인 수 인 계 서

□ 현    황

◯ 사업개요

- 사 업 명 : 마곡구역 도시개발사업(3,665천㎡)

- 사업기간 : ’08.12. ~ ’19.12.

- 시 행 사 : SH공사(2공구-진흥기업, 3-1공구-고덕종합건설)

- 위    치 : 강서구 마곡동, 가양동, 공항동, 방화동, 내･외발산동

- 급수계획 : 42천세대(114천명), Q=38,306㎥/일

※ 공사규모 : 2~3-1공구 D80~D1,500㎜, L= 28.3㎞

◯ 인수인계 대상 : 2공구, 3-1공구 상수도시설물

1. 상수관망도 1부 - 격점별 수압분포도, 이설관망, 밸브(약식) 포함

2. 시공상세도 1부. - 밸브, 급수관, 압륜, 곡관 수직(V)-수평(H) 표시  포함

3. 맨홀관리대장(바인더) 1부. - 밸브 및 밸브실 제원, 사진(내외부), GIS위치도 포함

4. 위 1~3항에 대한 각 CD 2부.

※ 2공구(진흥기업)

- 상수도관 : D20~D1,000㎜, L=26.5㎞

(단위, m)

구분	계	D20~D50	D80~D250	D300~D500	D600~D700	D800이상
계	26,536	615	9,634	14,327	1,943	17
배수관	25,902	-	9,615	14,327	1,943	17
급수관 (분기관)	634	615	19	-	-	-

※ 공동구 시설(D200~300㎜, L=1.79㎞) 포함

- 밸 브 류 : 총 389개

(단위, 개)

구 분	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	소화전	유량계	비 고
계	389	253	32	50	49	1
1차 통수	13	8	-	-	1		‘14년 3월
2차 통수	5	3	-	-	2		‘14년 7월
3차 통수	42	20	8	8	6		‘14년 10월
4차 통수	67	45	8	6	8		‘15년 4월
5차 통수	57	40	3	2	12		‘15년 6월
6차 통수	50	38	1	4	7		‘15년 9월
7차 통수	33	29	1	1	2		‘15년 11월
8차 통수	10	8	-	-	2		‘16년 4월
9차 통수	22	13	3	3	2	1	‘16년 6월
10차 통수	61	29	6	26	-		‘16년 10월
11차 통수	22	16			6		‘18년 4월
12차 통수	7	4	2		1		‘18년 12월

※ 3-1공구(고덕종합건설)

- 상수도관 : D300~D1500㎜, L=1.8㎞

(단위, m)

구분	계	D20~D50	D80~D250	D300~D500	D600~D700	D800이상
계	1,759			1,393		366
송수관	366					366
배수관	1,342			1,342
퇴수관	501			501

- 밸 브 류 : 총 27개

(단위, 개)

구 분	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	소화전	유량계	비 고
계	27	15	3	9
이설및기타	27	15	3	9

- 기전시설(유량계 및 전식방지시설)은 2~3-1공구 인수인계에 포함

□ 인계기관(SH공사) 주의사항

◯ 인계되는 상수도시설물이 안정화 되는 기간(인수인계 시점부터 1년)까지 비상상황에 대비 최소 2인을 현장에 배치하여 누수복구, 관 세척 등 시설물 유지관리를 한다.

◯ 건축 급수협의가 되지 않아 분기되지 않은 급수시설에 대해서는 수도사업소에서 고지한 원인자부담금 납부로 대체한다.

◯ 건축물 인입급수관 미시공분에 대해 수도사업소에서 급수공사를 할 때 도로(보도, 차도) 굴착부분에 적극 협조한다.

◯ 하자담보 책임기간은 준공일로부터 3년으로 한다.

위 인수인계 대상과 주의사항을 확인하였으며,

인수인계하였음을 확인합니다.

2019. 10.

인수자 : 강서수도사업소장                             (인)

인계자 : SH공사 사장                                 (인)

입회자 : 상수도사업본부 시설관리과장                  (인)