설계변경 본부자문회의 결과

【2018. 3. 7(수)】

문서요청부서			도시철도토목부				담 당 자			김용선					요청일자			2018. 2.19
공 사 명			서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사									심의 안건		환기덕트 돌출부 이전에 따른 설계변경
공 사 개 요			공사규모			총연장 : 1,390.5m (정거장 1개소 187.5m, 본선 1,203m)
			공사기간			2010. 09. 16 ~ 2018. 12. 31
			감 리 사			벽산엔지니어링(주) 외3개사
			설 계 사			㈜서영엔지니어링
			시 공 사			㈜롯데건설 외 1개사
자문요청사유						10억이상 증액							자문요청금액				증 1,164백만원
설계변경사유(요약) ○ 본부장 방침(도시철도계획부-1433, 2015.02.17.)에 의거하여 서울시 보행환경 개선대책 일환으로 당초 보도부로 설계되었던 지하철 환기 덕트 돌출 구조물 위치를 도로 중앙분리대로 변경 ○ 금액변경 □ 당초 159,474백만원 → 변경 160,638백만원(증 1,164백만원)
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			“자문의견서 참조”
자문결과 조치					자문결과를 요청부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장			도시철도사업부장		박동룡					간 사		경전철1과장			최문기
	위 원			㈜도화ENG		나상호					위 원		중부대학교			김춘호
	위 원			㈜대웅컨설턴트		이규웅					위 원		㈜태조ENG			한동근
	위 원			토목3과장		호경수					위 원		궤도과장			최진규

설계변경 본부자문회의 결과

【2018. 3. 7(수)】

문서요청부서			도시철도토목부				담 당 자			유원하					요청일자			2018.2.19
공 사 명			지하철9호선3단계 922공구 건설공사									심의 안건		937정거장 1번 출입구, 환기구 등 이동 및 규모조정에 따른 설계변경
공 사 개 요			공사규모			총연장 : 1.470m (정거장 1개소 165m, 본선 1,305m)
			공사기간			2010. 09. 16 ~ 2018. 12. 31
			감 리 사			㈜선진엔지니어링 외2개사
			설 계 사			㈜유신, 동부엔지니어링(주)
			시 공 사			㈜대우건설 외4개사
자문요청사유						10억이상 감액							자문요청금액				감 4,644백만원
설계변경사유(요약) ○ 당초 보도상에 계획된 외부출입구(#1), 환기구등을 둔촌주공 재건축조합과의 협약체결에 따라 둔촌주공재건축정비사업 부지내 이동으로 삭제 ○ 시장님 지시사항(‘14.3.3)『보도에 환기구 설치하는 사례가 없도록 하기바람』, 본부장 방침(도시철도계획부-1433호(‘15.2.17)『지하철 환기구 개선계획 검토 보고』)에 의거 보도상 돌출구조물 937정거장 환기구를 도로중앙분리대 이동(#2,#4) 및 규모축소(#1~#4) 관련 설계변경 사항임 ○ 금액변경 □ 당초 143,517백만원 → 변경 138,873백만원(감 4,644백만원)
원설계자 의견 요약 :
자문결과		조건부가결			“자문의견서 참조”
자문결과 조치					자문결과를 요청부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장			도시철도사업부장		박동룡					간 사		경전철1과장			최문기
	위 원			㈜도화ENG		나상호					위 원		중부대학교			김춘호
	위 원			㈜대웅컨설턴트		이규웅					위 원		㈜태조ENG			한동근
	위 원			토목3과장		호경수					위 원		궤도과장			최진규