우이천 산책로 변경 사항 자문 의뢰 설명서

<우이천 상류 산책로 조성사업>

사업부서 : 도봉구청 물관리과

1. 제안사유

○ 우이천 상류 산책로 설치와 관련, 하천 심의위원회 의결사항인 “우이천 상류 산책로 조성사업”을 시행하여 많은 시민들이 이용하고 있는 기존 산책로와 연계·이용될 수 있도록 동선이 단절된 상류구간에 산책로를 설치 완료함으로서 주민들의 생활환경을 개선하고 하천중심의 지역발전을 도모코자 함.

○ 또한, 북한산 둘레길에서 우이천, 중랑천, 한강에 이르는 생태 보행망을 구축함에 있어 주변 학교 학생 및 보행약자 들의 보행편의성 및 안전성 확보를 위하여 산책로 조성 변경을 요구하는 민원이 발생되어 산책로 조성 계획을 변경함에 따라 치수안정성에 대하여 외부 전문가 자문을 받고자 함.

2. 사업개요

○ 사 업 명 : 우이천 상류 산책로 조성사업

○ 위    치 : 우이천 백운교 ∼ 석천교

○ 사업규모 :

- 산책로 조성 폭원2.0m, 연장0.8km

- 홍수방어벽 설치 연장 251m 등

○ 사업기간 : 2015.01. ∼ 2017.11.(설계 2015.3.27.∼12.18)

○ 사 업 비 : 25억원(공사비 24억원, 용역비 1억원)

○ 사업시행부서 : 서울특별시 도봉구(물관리과)

3. 추진사항

○ 2015. 04. 01 : 실시설계 착수보고

○ 2015. 09. 18 : 하천관리위원회 심의 안건 상정

○ 2015. 10. 15 : 실시설계 자문회의 개최(도봉구)

○ 2015. 10. 22 : 하천관리위원회 개최(재심의 의결)

○ 2015. 11. 16 : 하천관리위원회 심의 안건 재상정

○ 2016.  3. 16 : 서울시 계약심사 완료

○ 2016.  4. ∼ 12. : 1차 공사 준공(폭원2.0m, 연장0.6km)

○ 2017.  3. ∼ 11. : 2차 공사 준공(폭원2.0m, 연장0.2km)

4. 산책로 조성 현황 위치도

덕성여대

석천교

문이교

백운교

2016년 완료(시비: 1,400백만원)

산책로 조성(폭: 2m, 연장:0.6km)

2017년 시행(시비: 1,000백만원)

산책로 조성(폭: 2m, 연장:0.1km)

하천시설물 정비 1식 등 완료

근화교

2017년 시행(시비: 1,000백만원)

산책로 조성(폭: 2m, 연장:0.1km)

5. 산책로 설치에 따른 계획홍수위 검토

○ 우이천 하천 검토 조건

- 검토구간 : 우이천(지방하천) No.137∼No.166(1.45㎞)

- 계획홍수량 : 175㎥/s (100년 빈도)

- 여유고 기준 : 0.6m

- 중랑천권역(서울특별시) 하천기본계획(변경) (2012.7, 서울지방국토관리청)」에서 고시된 계획홍수위를 검토하여 제내측 보도 확장 계획시 계획홍수위 및 여유고 기준 이상으로 설치하였음.

○ 계단 및 경사로 설치에 따른 수리 영향 검토

구분	검토1안 (계단 설치시)	검토2안 (경사로 설치시)	비고
개 요	산책로 설치에 따른 문의교 통과방안으로 하천심의시 계단을 설치하여 문의교 하부로 통행하는 것으로 계획·설계 반영하였으나, 시공시 주민 민원 요청에 따라 경사로로 설치하는 것으로 변경 시공되어, 이에 대한 수리 영향을 검토하여 안정성을 확보하고자 함.
교량구간 통과방안	계단설치	경사로설치
단면도
설치 연장	L=18+13=31.0m	L=27+20=47.0m
계획홍수위	49.0m	49.0m
교량 저고	49.83	49.83
계단 및 경사로 설치시 홍수위	49.05(+0.05)	49.08(+0.08)
검토결과	검토1안(계단 설치시)은 계획홍수위 대비 0.05m 증가, 검토2안(경사로 설치시)은 0.08m 증가로 계단 및 경사로 설치시 교량 저고(49.83m) 기준으로 여유고(0.6m)를 만족하는 것으로 검토되어 수리에 대한 안정성을 확보하는 것으로 검토되었음.

첨부자료

◦ 우이천 상류 산책로 도면(당초 및 변경) 각 1부.

◦ 산책로 변경에 따른 수리영향 검토서 1부.

◦ 홍수위 검토 전산 파일 1부.