주요 심사내용

□ 공 사 명 : 금천소방서 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 1054-8외 14필지
공사개요	지하1층/지상6층, 연면적 5,249.56㎡
공사기간	착공일로부터 24개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,903,451	천원
○	심사금액	:	2,016,874	천원
○	절 감 액	:	886,577	천원
○	절 감 률	:	30.5	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정

- 경  유 : 1,243.88원/ℓ → 1,321.4원/ℓ(서울시 8월 유류대 적용)

- 휘발유 : 1,345.52원/ℓ → 1,444.1원/ℓ(서울시 8월 유류대 적용)

- H-PILE : 850천원/톤 → 840천원/톤

- 소철선(어니일링, #8  4.0mm) : 1,360원/kg → 1,179원/kg

- 소철선(어니일링, #20  0.9mm) : 1,420원/kg → 1,404원/kg

- 철못(75×3.25mm) : 1,375원/kg → 1,093원/kg

- 외송각재 : 390,000원/㎥ → 376,675원/㎥

- 아스팔트(RSC-3,4) : 160천원/DM → 143천원/DM

- 보통시멘트(40kg/포) : 3,820원/포 → 3,473원/포

- 박리제(목재용, 수성) : 1,250원/ℓ→ 959원/ℓ

- 도로용페인트(융착식,백색) : 3,140원/kg → 2,810원/kg

- 프로판가스 : 841원/kg → 1,016원/kg

-  PC콘(7mm) : 50,000원/개 → 5,600원/조

- CASING PIPE(어스앙카용, 114mm,125mm) : 80,000원/m → 9,017원/m

- PC강연선(7연선,12.7mm, 0.785/m)  : 2,192원/kg → 1,650원/kg

- 아세칠렌 : 13,000원/kg → 11,500원/kg

- 후판(8<T<9mm) : 800원/kg → 780원/kg

- 후판(9<T<12mm) : 760원/kg → 730원/kg

- 후판(12<T<20mm) : 750원/kg → 730원/kg

- 모래(현장도착도) : 30천원/㎥ → 25천원/㎥

- 고장력볼트(M22×80mm) : 1,224원/조 → 1,184원/조

- 윙비트(16") : 560천원/개 → 470천원/개

- 원심력철근콘크리트관(300㎜,소켓식, B형) : 54,400원/본 → 49,100원/본

- PE 발디딤쇠 : 6,000원/개 → 4,500원/개

- 급수호수(D38~D50mm×10.0m) : 37,600원/개 → 28,300원/개

등 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 흙운반(토사) : 경비 적용

- 되메우기 및 다짐(기계100%), 콘크리트 타설, 철근가공및조립, 철근콘크리트타설 등 : 표준시장 단가 적용

- 강판구멍뚫기 : 마그네틱 전기드릴 천공품 적용

- 사토처리 : 덤프트럭 24.0 TON, 운반속도 조정, 경비로 적용

- 모르터 : 노무품 조정(건축 9-1-1)

- 볼트조이기, 볼트풀기 : 노무품 조정(서울형 품셈 적용)

- 말뚝박기용천공 토사 : 품셈기준 조정(공통 5-3-2)

- 강판절단 : 아세틸렌 → 프로판가스 적용

- 잡재료비, 공구손료 : 재료비로 적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

○ 관급자재비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)