주요 심사내용

□ 사 업 명 : 노들로 구조개선공사

□ 사업 개요

○ 공사위치 : 영등포구 양평동 양화교~동작구 본동 한강대교남단

○ 규    모 : 구조개선: 폭 40.5(17.5)m, 연장8.5km

(평면교차로 3개소, 자전거도로 및 보도 신설 등)

○ 총사업비 : 15,650백만원

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조 정 액	조정률
계	9,084,100	8,661,180	422,920	4.66%
토 목	8,877,690	8,458,560	419,130	4.72%
조 경	206,410	202,620	3,790	1.84%

주요 심사내용(토목분야)

□ 공 사 명 : 노들로 구조개선공사

□ 사업개요

위 치	영등포구 양평동 양화교~동작구 본동 한강대교 남단
공사개요	구조개선: 폭 40.5m, 연장 4.0km(양화교~양화대교) 구조개선: 폭 17.5m, 연장 4.5km(양화대교~한강대교)
공사기간	착공일로부터 27개월

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	8,877,690	천원
○	심사금액	:	8,458,560	천원
○	조 정 액	:	419,130	천원
○	조 정 률	:	4.72	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 보도블럭철거 품 조정(감16,534천원)

- 폐아스콘 상차 품(단위중량) 조정(감35,872천원)

- 배수(VR)관 부설접합 품 조정(감24,983천원)

- 차선도색(상온경화형, 융착식) 품 조정(감35,781천원)

- 가림막휀스 설치 및 철거 품 조정(감38,850천원)

- 품질관리비(시험비) 면제대상(감64,591천원)

- 절삭후덧씌우기 품(야간노임 산출오류) 조정(증165,349천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 잔토처리(집하장-사토장) 운반경로를 사업설명서에 명기하여 발주

◦ 특정기술(신기술,특허공법) 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용(조경분야)

□ 공 사 명 : 노들로 구조개선공사

□ 사업개요

위 치	영등포구 양평동 양화교 ~ 동작구 본동 한강대교 남단(노들로)
공사개요	도로구조개선, 자건거도로 및 보도 설치 등
공사기간	2021. 10. ~ 2023. 12.(27개월)

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	206,410	천원
◦ 심사금액 :	202,620	천원
◦ 조 정 액 :	3,790	천원
◦ 조 정 률 :	1.84	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 유기질비료: 10,000원/포→8,000원/포(감 1,030천원)

◦ 일위대가 조정

- 느티나무 식재: 시비량 중복 계상 제외(감 4,400천원)

- 수목보호판 설치: 서울시 설계기준 적용(감 1,948천원)

- 수목재료 할증: 서울시 할증기준(3%) 적용(감 1,465천원)

- 관목류 식재: 수목 규격별 품셈 적용오류 정정(증 4,836천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견없음