주요 심사내용

□ 공 사 명: 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사-설계변경

□ 사업개요

위 치	성북구 하월곡동 46-73번지 일원
공사개요	내부순환로(월곡IC) 구조개선공사 민원보완 설계변경 - 보도(투수블럭, 판석) 정비 및 아스팔트 절삭후 덧씌우기 - 녹지대 조성 및 소나무 식재 등
공사기간	2020. 2. 12. ~ 2023. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦설계금액:	1,610,832	천 원(증액)
◦심사금액:	1,526,640	천 원(증액)
◦조 정 액:	84,192	천 원
◦조 정 률:	5.23	%

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 일위대가 조정

- 보도블럭포장(투수블럭): 품 수정(품셈유지관리 2-1-24) (감 28,579천 원)

- 판석포장(6cm): 수량(3cm) 분리작성 및 와이어메쉬 중복 제외 등 (감 19,076천 원)

- 잔토처리(보통토사): 차량속도 수정(서울형품셈 토목12) (감 1,743천 원)

- AL수로관 연결소켓: 수량 재산정(수로관 3M당 1개) (감 435천 원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과: 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)