주요 심사내용

□ 공 사 명: 상계중앙시장 고객지원센터 신축공사(건축)

□ 사업개요

위 치	노원구 상계동 389-666호
공사개요	- 공사개요 · 본관동 스프링클러 설치 공간 면적 7,350.2㎡ · 병동운영을 위한 61병동 리모델링
공사기간	2020.4. ~ 2021.12.

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	928,521	892,092	36,429	3.92%
건축	855,932	825,006	30,926	3.61%
기계설비	72,589	67,086	5,503	7.58%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 7종 (△132천원)

◦ 일위대가 조정

- 경량철골천정틀: 품셈적용 오류 수정 (△5,739천원)

- 각파이프(S): 품셈적용 오류 수정 (△6,740천원)

- 건식벽체설치(낮은벽): 서울형품셈 적용 (△1,880천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 어린이병원 본관동 스프링클러 설치공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	서초구 헌릉로 260 (내곡동 375) 어린이병원 본관동
공사개요	○ 어린이병원 스프링클러 설비공사 - 노후밸브교체, 의료가스배관공사 등
공사기간	2020.4.~2021.12.

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	72,593	천원
◦ 심사금액:	67,086	천원
◦ 절 감 액:	5,507	천원
◦ 절 감 률:	7.59	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: CM 유니온 등 5종

- CM 유니온(D20)/개: 4,298원 → 3,120원(감1,178원)

- COPPER TUBE ‘L’ TYPE(D20)/m: 6,791원 → 6,181원(감610원)

- COPPER TUBE ‘L’ TYPE(D15)/m: 4,289원 → 3,939원(감350원) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음