주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 하계 지하차도 보수공사

□ 사업개요

위 치	노원구 공릉동 537번지
공사개요	- 강성포장 5,263㎡ - 신축이음보수 204m - 방호울타리교체 666m 등
공사기간	2019. 3 ~ 2019. 12

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,750,367	천원
◦ 심사금액 :	1,696,200	천원
◦ 절 감 액 :	54,167	천원
◦ 절 감 률 :	3.1	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정 :  프로판가스 외 9개 자재

- 경  유 : 1,255.5원/ℓ → 1,219.8원/ℓ(서울시 3월 조사단가)

- 휘발유 : 1,358.1원/ℓ → 1,315.9원/ℓ(서울시 3월 조사단가)

- 프로판가스 : 1,873원/kg → 1,016원/kg

- 교통안전표지(삼각 900mm) : 90,000원/개 → 51,820원/개

- 컨테이너(사무실) : 2,350,000원/동 → 2,059,000원/동

- 아스팔트(RSC-3,4) : 160,000원/드럼 → 143,000원/드럼

- 블레이드 : 169,800원/개 → 141,000원/개 등 거래실례가격

◦ 일위대가 조정

- 기구손료, 공구손료 : 재료비로 계상

- 콘크리트포장 절단 : 보통인부 2인 → 1인(토목품셈1-7-1)

- 중성화방지재 도표 : 도장공 등 노무품 조정(건축품셈 11-2-4)

- 중기운반비 : 적재 및 적하 10분 초과 유류비 공제(공통품셈8-1-3)

- 콘테이너형사무실(창고)설치 및 해체 : 크레인 3시간 → 2시간

- 폴리우레탄 실링 : 방수공 등 노무품 조정(건축품셈6-2-1)

- LMC 생산 : 보통인부 0.508 → 0.45(생산 단가산출 )

- 교통통제수, 교통신호수, 교통정리원, 차량유도자 : 경비 적용

- C.W 배수유공관 설치 : 노무품 조정(서울형 품셈)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정(자재)공법 선정 심사 : 선정 심사 완료

◦ 설계도면과 물량내역서, 특별시방서를 일치시켜 발주 요망

◦ 관급비 및 이전비 : 심사 제외