주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022년 보도보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	관악구 관내
공사개요	- 보도용 블록설치 A=50a - 보차도경계 측구설치 L=1,820m 등
공사기간	2022. 3. ~ 2022. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	1,381,400	천원
◦	심사금액	:	1,315,890	천원
◦	조 정 액	:	65,510	천원
◦	조 정 률	:	4.74	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 강모래(자연사) : 35,000원/㎥ → 30,000원/㎥ (감2,066천원)

◦ 일위대가 등 조정

- 보도블록철거 2개 공종 : 할증 조정(품셈토목 1-10-21,22) (감1,270천원)

- 가로수보호대(화강석) : 품 및 할증 조정(품셈토목 1-10-26) (감13,383천원)

- 보도용 블록설치 등 9개공종 : 공구손료 등 중복 조정(품셈토목 1-10-23,24) (감1,871천원)

- 컨테이너(3×6, 12개월) 손료(16→34%) 조정(품셈공통 2-2-3) (증842천원)

- 보행안전도우미, 교통신호수 : 경비로 조정

- 전자인력관리단말기 : 임대료(10개월) 조정 (감400천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)