주요 심사내용

□ 공 사 명 : 저수로(신정동 구간) 사각형거보수공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	양천구 국회대로 228~ 목동로 212
공사개요	단면보수 9,673㎡, 철근방청보수 530㎡ 등
공사기간	2021. 4. 23. ~ 2022. 11. 30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	394,103	천원(증액)
○	심사금액	:	394,103	천원(증액)
○	조 정 액	:	-	천원
○	조 정 률	:	-	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 별도 의견 없음

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음