주요 심사내용

□ 공 사 명 : 발산빗물저류조 개선(복개)사업(설계변경 4회)

□ 사업개요

위 치	강서구 내발산동 739(발산근리공원내)
공사개요	저류조 복개 A=5,575㎡, H=4.25m 등
공사기간	2020. 6. 22. ~ 2021. 11. 30.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	312,400	천원(증액)
○	심사금액	:	290,558	천원(증액)
○	조 정 액	:	21,842	천원
○	조 정 률	:	6.99	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 및 일위대가 등 조정

- 산업안전보건관리비 조정(감2,601천원)

- 품질관리비(활동비) 조정(감16,702천원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음