주요 심사내용

□ 공 사 명: 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 조성(설계변경)

□ 사업개요

위 치	중구 소파로 46
공사개요	지상1층, 연면적 223.9㎡
공사기간	2018.11. ~ 2022.9.

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	61,092	39,597	21,495	35.18%
건축	72,535	51,573	20,962	28.90%
토목	2,425	2,425	0	0%
조경	10,177	10,177	0	0%
기계	-24,045	-24,578	533	2.22%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 마천석 외 2종 (△8,906천원)

◦ 일위대가 조정

- 단열재할증 : 서울형품셈(1.1→1.05) 적용 (△969천원)

- 내부수평비계 : 이동식말비계 대체 적용으로 제외 (△3,185천원)

- 품질시험비 : 시조례에 따라 수수료 감면(△1,834천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 남산 회현자락 한양도성 유적전시관 설계변경(기계)

□ 사업개요

위 치	중구 소파로 46(회현동1가 100-177)외 13필지
공사개요	◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 위생배관공사, 환기설비공사 등
공사기간	2018년 11월 ~ 2022년 9월까지

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	-24,045	천원
◦ 심사금액:	-24,578	천원
◦ 조 정 액:	533	천원
◦ 조 정 률:	2.22	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 분말소화기 외 13종

- 분말소화기(3.3㎏): 17,340원/개 → 15,640원/개(감5천 원)

- 장애인용소변기(전자감응식): 484,000원/set → 423,000원/set(감52천 원) 등

◦ 일위대가 조정: B.D.D 외 3개 공종

- B.D.D(D100): 설치 품 조정(기계 2-5-5)(감34천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음