주요 심사내용

□ 공 사 명 : (구)서울의료원 강남분원 철거공사

□ 사업개요

위 치	강남구 삼성동 171-1
공사개요	서울의료원 강남분원 철거 - 9개동, 지하1층/지상5층, 연면적 27,743㎡
공사기간	착수일로부터 2개월

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	4,295,980	천원
◦	심사금액	:	3,907,085	천원
◦	조 정 액	:	388,895	천원
◦	조 정 률	:	9.05	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산 조정

- 간접노무비 : 요율 조정(13%→12.5%)

- 하도급대금지급보증수수료 : 제외(전문공사 해당사항 없음)

◦ 일위대가 조정

- 경량천장철골틀 해체 : 22년 신설품셈 적용 (감108,260천원)

- 텍스 해체 : 22년 신설품셈 적용 (감143,981천원)

PVC계바닥재 해체 : 22년 신설품셈 적용 (감62,425천원)

콘크리트구조물 헐기 : 품셈 오류적용 조정 (감107,486천원)

시스템비계 설치및해체 : 품셈 오류적용 조정 (증81,516천원)

벽돌 철거 : 품셈 오류적용 조정 (증153,074천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음