주요 심사내용

□ 공 사 명 : 시립청소년음악창작센터 건립공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	양천구 신정동 1290-6 외 4필지
공사개요	음향 및 인테리어공사 설계변경
공사기간	20. 4. ~ 22. 9.

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	2,740,947	천원
◦	심사금액	:	2,466,124	천원
◦	조 정 액	:	274,823	천원
◦	조 정 률	:	10.03	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 테라코트: 물자정보지 단가 적용(62,795원→25,026원) (감75,731천원)

◦ 일위대가 조정

<건축공사>

- 모르타르 바름: 품셈 변경적용(3.6m초과→3.6m이하) (감4,795천원)

잡철물제작설치: 2022년 개정품셈 적용 (감39,291천원)

MDF(천정,12mm 1겹) : 품셈 오류적용 조정 (감1,628천원)

DRY-WALL(DS1): 서울형품셈 적용 (감14,962천원)

<실내공사>

- 잡철물제작설치: 2022년 개정품셈 적용 (감54,559천원)

STUD: 2022년 개정품셈 적용 (감2,868천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음