주요 심사내용

Ⅰ. 심사개요

□ 공 사 명: 서남병원 증축 및 리모델링 공사

□ 사업개요

위 치	양천구 신정이펜1로 20(서남병원)
공사개요	지하4층/지상9층, 연면적 43,218.20㎡(금회 증축:3,893.36㎡)
공사기간	착공일로부터 33개월

□ 심사평가 결과

[천원]

구 분	설계금액	심사금액	조정액	조정률
총 괄	19,300,883	17,750,615	1,550,268	8.03%
건 축	17,575,638	16,225,415	1,350,223	7.68%
토 목	367,212	346,199	21,013	5.72%
조 경	1,358,033	1,179,001	179,032	13.18%

Ⅱ. 분야별 심사내역

□ 건축분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 외 64종

- 경유: 1,427.3원/L → 1,560.1원/L (증132.8원/L)

◦ 일위대가 조정: 가설벽체설치 외 17개 공종

- 가설벽체설치: 서울형품셈 적용(감34,081천원)

- 앵커볼트설치: 표준시장단가 적용(감28,924천원)

- 경량철골천정틀철거: 품셈적용 오류 수정(감31,024천원)

◦ 제비율 조정

- 기타경비: 7.9% → 6.1%

- 고용개선지원비(주휴수당): 산출식 오류 수정

- 품질시험비: 시조례에 따라 감면(시 품질시험소의뢰)(감2,360천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음

□ 토목분야

□ 주요 심사내용 (직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,570.7원/L → 1,658.1원/L

- 경유: 1,427.3원/L → 1,560.1원/L

- 혼합골재: 25,000원/㎥ → 24,000원/㎥

- 쇄석자갈(40mm): 32,000원/㎥ → 30,000원/㎥

- H형강: 1,250천원/톤 → 1,210천원/톤

◦ 일위대가 조정

- 말뚝박기천공: 발전기 규격 수정(서울형품셈)

- H파일박기: 천공시 항타 작업시간 반영 제외(공통5-3-2) (감857천원)

- 띠장우각부연결: 볼트연결품 제외(H빔설치 철거에 포함)

- 품질시험비: 시 품질시험소 의뢰 대상으로 제외(시험비 무료) (감4,068천원)

◦ 제비율 조정

- 기타경비: 요율(7.9%→6.1%) 조정 (감3,748천원)

- 고용개선지원비: 주휴수당 산출식 오류 수정 (감7,315천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비,이전비 등은 심사제외(별도검토 후 시행)

□ 조경분야

□ 주요 심사내용 ※ 직접공사비 기준

◦ 자재단가 조정: 경유 등 5종

- 경유: 1,427.3원/ℓ → 1,506.1원/ℓ (증132.8원)

◦ 일위대가 조정: 플랜터 설치 등 3개 공종

- 플랜터 설치: 잡철물제작설치품(품셈8-31)적용(감41,989천원)

- 수목식재: 서울시기준 할증5%적용(감9,797천원)

- 천연석포장: 할증조정(감4,073천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음