주요 심사내용

□ 공 사 명 :  시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	지하철 2호선 시청역 지하1, 2, 3층
공사개요	- 지상 1,2,3층 석면함유뿜칠재 제거 6,208㎡ - 내진보강에 따른 건축마감재 교체
공사기간	2019.2 ~ 2021.7

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	845,499	천원
◦ 심사금액 :	825,104	천원
◦ 절 감 액 :	20,395	천원
◦ 절 감 률 :	2.41	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 용접봉 외 8종 (△1,401천원)

◦ 일위대가 조정

- 강재트러스설치(야간) 화강석 건식붙임 : 표준품셈 적용 오류수정(△2,330천원)

- 셔터설치(야간) : 표준품셈 적용 오류수정 (△1,103천원)

- 건설폐기물처리비 : 100톤이상 분리발주대상으로 제외 (△13,812천원)

- 안전관리원 : 간접노무비에 포함되어 제외(△1,634천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견없음