주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도봉119안전센터 이전 신축공사(건축)

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 도봉동 282-345
공사개요	지상3층, 연면적 998.96㎡, 신축
공사기간	2021.8 ~ 2022.4

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	1,675,099	1,627,341	47,758	2.85%
건축	1,430,006	1,399,395	30,611	2.14%
토목	79,001	70,461	8,540	10.81%
기계	166,092	157,485	8,607	5.18%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 18종 (감1,424천원)

◦ 일위대가 조정

- 타일압착붙이기(벽) : 품셈적용 오류수정(감1,872천원)

- 단열재할증 : 서울형품셈 적용 (감2,437천원)

- 품질시험수수료 : 시조례에 따라 면제 (감8,478천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 반영 및 정산 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도봉119안전센터 이전·신축 공사(토목)

□ 사업개요

위 치	도봉구 도봉동 282-345
공사개요	도봉119안전센터 이전 및 신축
공사기간	2021.8 ∼ 2022.4

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	79,001	천원
◦	심사금액	:	70,461	천원
◦	조 정 액	:	8,540	천원
◦	조 정 률	:	10.81	%

□ 주요 심사 내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 아세칠렌(용접용): 14,100원/kg→12,042원/kg

- 아스팔트유제: 140,000원/드럼→126,000원/드럼 등

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 구조물터파기외1종: 노무품 수정(감557천원)

- 입도조정기층포설및다짐: 품셈1-4-3 적용(감122천원)

- 보조기층포설및다짐: 품셈1-3-3 적용(감111천원)

- 중기운반(트럭트레일러): 경비항목으로 적용

- 투시형휀스: 품셈6-1-2 적용(감190천원)

- 모르터(1:3): 노무품 조정(건축 9-1-1)(감789천원)

- PVC이중벽관(300㎜): 자재 중복 수정(감3,276천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

◦ 관급자재비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 도봉119안전센터 이전·신축 공사(기계)

□ 사업개요

위 치	도봉구 도봉동 282-345
공사개요	◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 위생배관공사, 환기배관공사, 가스배관공사, 전기바닥난방설치공사 등
공사기간	착공일로부터 ∼ 2022년 4월까지

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	166,092	천원
◦ 심사금액:	157,485	천원
◦ 조 정 액:	8,607	천원
◦ 조 정 률:	5.18	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 급탕팽창탱크 외 40종

- 급탕팽창탱크(200ℓ): 1,880,000원/대 → 1,580,000원/대(감300천 원)

- 가스보일러(25,000㎉/h): 913,000원/대 → 700,000원/대(감213천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 스테인리스배관 외 14개 공종

- 스테인리스배관(D65×3T): 배관공 0.097 → 0.087, 보통인부 0.04 → 0.036
(기계 1-3-2)(감92천 원)

- 소변기(전자감지식): 위생공 0.907 → 0.796(기계7-1-1)(감86천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사회보험료 및 고용개선장려금은 관련 조례 개정 이후 적용

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음