주요 심사 내용

[ 마곡 산업단지 공공산업지원시설 건립공사 (설계변경) ]

□ 사업 개요

○ 공사위치 : 강서구 마곡동 771-1

○ 건축규모 : 지하4층, 지상8층, 연면적 21,628.58㎡

○ 총공사비 : 28,735,300천원

○ 발주부서 : 도시기반시설본부(건축부)

□ 건물 현황

현장 사진	조감도

□ 심사평가 결과 : 절감액 106백만원(1.78%)

[천원]

구 분	요청금액(도급비)	심사금액(도급비)	조 정 액	조정률
계	5,955,637	5,849,344	106,293	1.78%
건축	3,550,929	3,458,015	92,914	2.62%
토목	1,338	1,338	0	0%
조경	6,250	6,250	0	0%
인테리어	2,397,120	2,383,741	13,379	0.59%

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 마곡 산업단지 공공산업지원시설 건립공사 (설계변경)

□ 사업개요

위 치	강서구 마곡동 771-1
공사개요	지하4층, 지상8층, 연면적 21,628.58㎡
공사기간	착수일로부터 38개월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	5,955,637	천원
◦	심사금액	:	5,849,344	천원
◦	조 정 액	:	106,293	천원
◦	조 정 률	:	1.78	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 시중물가지 단가 적용

· 보통합판 외 24종 (감14,163천원)

◦ 일위대가 조정

- 바탕 고르기(바닥) : 표준시장단가 적용(감10,752천원)

- 수성 페인트(롤러칠) : 표준시장단가 적용(감960천원)

- 타일 압착붙이기(바닥) : 표준시장단가 적용(감229천원)

- 타일 압착붙이기(벽) : 표준시장단가 적용(감1,455천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)는 관련 조례 개정 시 반영 필요

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음