주요 심사내용

□ 공 사 명 : 빈집활용사업(초행지붕-상도) 건설공사

□ 사업개요

위 치	동작구 상도동 214-425
공사개요	지상4층, 연면적 200.64㎡, 신축
공사기간	2021.10 ~ 2022.08

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	1,117,508	1,057,686	59,822	5.35%
건축	787,772	766,813	20,959	2.66%
토목	230,667	194,500	36,167	15.68%
기계	99,069	96,373	2,696	2.72%

□ 주요 심사내용(직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가 적용

· 비계안정장치 외 27종 (감1,194천원)

◦ 일위대가 조정

- 단열재할증 : 서울형품셈 적용(감764천원)

- 습식공법(화강석) : 서울형품셈 적용(감146천원)

- DRY WALL : 서울형품셈 적용(감550천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 : 빈집활용사업(초행지붕-상도) 건설공사(토목)

□ 사업개요

위 치	동작구 상도동 214-425번지
공사개요	대지면적/건축면적/연면적 : 173.83㎡/70.29㎡/200.64㎡
공사기간	2021.10 ~ 2022.08

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	230,667	천원
○	심사금액	:	194,500	천원
○	조 정 액	:	36,167	천원
○	조 정 률	:	15.68	%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 고철 등 6종

고철 : 140원/kg→ -490원/kg (감342천원)

○ 일위대가 등

덤프운반 토사 L=30km : 운반거리 등 조정(서울형품셈 등) (감2,972천원)

바닥면고르기 : 노무품 조정(표준품셈 3-3-1) (감456천원)

말뚝박기천공 : 발전기 450kw→200kw(서울형 품셈) (감3,032천원)

경사계 측정, 지표침하계 측정 등 : 재료비+노무비+경비 → 경비 등

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(사토장, 토취장, 강재 등)는 공사 시방서에 표기

주요 심사내용

□ 공 사 명: 빈집활용사업(초행지붕-상도) 건설공사(기계)

□ 사업개요

위 치	동작구 상도동 214-425번지
공사개요	◦ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 환기덕트설치공사, 위생설비공사, 냉난방기설치공사, 가스설비공사 등
공사기간	2021.10 ~ 2022.08

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 설계금액:	99,069	천원
◦ 심사금액:	96,373	천원
◦ 조 정 액:	2,696	천원
◦ 조 정 률:	2.72	%

□ 주요 심사내용(※ 직접공사비 기준)

◦ 자재 단가 조정: 일반용경질폴리염화비닐관 외 46종

- 일반용경질폴리염화비닐관(VG1, D100): 9,168원/m → 6,230원/m(감146천 원)

- 샤워부스용수전: 200,000원/개 → 170,000원/개(감150천 원) 등

◦ 일위대가 조정: 세탁기수전 외 9개 공종

- 세탁기수전(급수,급탕): 위생공 0.087 → 0.061, 보통인부 0.017 → 0.012
(기계 7-2-4)(감57천 원) 등

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과: 이견 없음