주요 심사내용

□ 공 사 명 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사(설계변경)

□ 사업개요

위 치	성동구 성수동2가 277-34(아차산로17길 19)
공사개요	지하2층/지상7층, 연면적 2,711.51㎡
공사기간	2020.6.30. ~ 2022.6.30

□ 심사평가 결과 (※관급비 심사제외)

◦	설계금액	:	149,905	천원
◦	심사금액	:	149,905	천원
◦	조 정 액	:	0	천원
◦	조 정 률	:	0.00	%

□ 주요 심사내용  (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 조정내역 없음

◦ 일위대가 조정

- 조정내역 없음

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음