주요 심사내용

□ 공 사 명: 가리봉 골목길 재생사업 가로환경 개선공사

□ 사업개요

위 치	구로구 구로동로2다길 일원
공사개요	연장 396m, 폭 1.5~3m, 주택 22동, 담장 등 건축환경 개선
공사기간	착수일로부터 6개월

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	조정액	조정률
총괄	772,519	708,629	63,890	8.27%
건축	665,093	603,243	61,850	9.30%
토목	107,426	105,386	2,040	1.90%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

◦ 원가계산서 조정

- 간접노무비: 13.7%→12.5%

- 산업안전보건관리비: 1.86%+5,349천원→2.93%

- 기타경비: 8.4%→7.8%

- 주휴수당: 3.5%→4.3%

- 철거작업부산물: 제비율제외공정으로 산출

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보 등 단가 적용

· 철강설 외 6종(감247천원)
◦ 일위대가 조정

- 각종 잡철물 제작및설치: 개정품셈 적용(감24,027천원)

- 강재창호철거: 품셈적용 오류 수정(감1,246천원)

- 사회보험료, 고용개선장려금: 자치구 발주사업 계상제외

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용(토목)

□ 공 사 명 : 가리봉 골목길 재생사업 가로환경 개선공사(토목)

□ 사업개요

위 치	구로구 구로동로2다길 일원
공사개요	- 사업규모 : 연장 396m. 폭 1.5~3m, 인접주택 22동 - 사업내용 : 보도환경개선 및 경사로 정비 등
공사기간	2022. 6. ~ 2022. 12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	107,426	천원
◦	심사금액	:	105,386	천원
◦	조 정 액	:	2,040	천원
◦	조 정 률	:	1.90	%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준)

◦ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,340.9원/ℓ→1,704원/ℓ(조달청) (증107천원)

- 경  유: 1,186.36원/ℓ→1,608원/ℓ(조달청) (증1,230천원)

- 철강설(고철, 중량A) : -575원/kg → -680원/kg (물자/하47) (감37천원)

◦ 일위대가 조정

- 오배수관로 토공작업 : 굴삭기 장비(타공정과 동일 0.6㎡ → 0.2㎡) 조정 (감780천원)

- 폴리머 U형집수정 3개 공종 : 터파기 수량 중복(오배수관 토공작업) 제외 (감51천원)

- 작업장 안전요원배치 : 안전관리비로 별도 조정

◦ 제비율 조정

- 간접노무비 : 요율 조정(13.7% →  12.5%) (주공정 건축 제비율 적용) (감409천원)

- 기타경비 : 요율 조정(8.4% → 7.8%) (주공정 건축 제비율 적용) (감328천원)

- 고용개선지원비 : 주휴수당(3.8% → 4.5% 조정) 외 시비지원 비대상 제외 (감1,836천원)

- 전자인력관리단말기 : 임대료(6개월) 조정 (감300천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

◦ 관급자재비 및 이전비 심사 제외(별도 검토 후 시행)