준공기한 연기의뢰서

1. 용역개요

가. 용  역  명 : 광운대역~월계로간 도로개설 외 1건 타당성조사 용역

나. 계  약  자 : 극동엔지니어링 주식회사

다. 계 약 금 액 : 일금 이억오천팔십구만일천원(￦250,891,000)

라. 계약년월일 : 2018. 05. 08.

마. 착수년월일 : 2018. 05. 09.

바. 준공예정일 : 2019. 06. 03.

2. 요청내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

구 분	당 초	변 경
총 차	2019.06.03.	2019.07.03.

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 용역 성과품의 완성도 제고를 위한 추가 대안분석 등 타당성 조사 보완을 위하여 과업 기간 연장

2019. 05.

도로계획과장 안 대 희 (인)

서울특별시 경리관 귀하