중간적치장 운영 주요 개선사항(요약)

□ 관련규정

❍ 「하수관로의 터파기 및 포장 복구시 굴착토사는 중간적치장 등을 활용하여 즉시 현장에서 반출하고, 양질의 토사로 되메우기 후 층다짐 실시」(물순환안전국 하수도분야업무처리지침 6-3 하수관거의 설계, 2013년)

발생토사(사토) 처리과정

터파기 현장		중간적치장		최종 사토장

선별토사

발생토사

잔토

□ 그간의 현황 및 문제점

❍ 중간적치장 미운영 공사현장에서 발생토사를 중간적치장에 경유한 것으로 정산하거나, 규모가 협소하여 운영이 불가함에도 설계량 전량을 운반한 것으로 정산 시행

터파기 현장		중간 적치장		최종 사토장

현장에서 사토장

직접 반출

❍ 중간적치장으로 반출·반입하지 않고 현장에서 유용하였음에도 토사를 중간적치장에 운반한 것으로 정산 시행

❍ 타 공사현장과 중간적치장 공동 사용으로 발생토사가 섞여서 토사 관리 및 운반량 산출이 곤란함.

❍ 현장 발생토에 대한 감독(감리)자의 물량 확인 소홀(작업일지 미작성, 반입·반출량 확인 미흡 등)

□ 개선사항

○ 현장발생 운반토사에 대한 관리감독 철저

➡ 중간적치장으로 운반되는 토사는 실제 운반량만 정산

➡ 발생토의 중간적치장 운반량은 작업일지에 기록

➡ 감독(감리)자는 발생토 처리과정 관리 철저

○ 중간적치장 운영 철저

➡ 중간적치장의 적정 운영 규모를 감안한 시공 관리

➡ 발생토(폐기물)가 섞이지 않도록 구역을 분리하여 관리

【 현장발생 운반토사에 대한 관리감독 철저 】

❍ 발생토는 실제 운반량만 정산

- 중간적치장에서 반입·반출되는 토사량은 실제 운반물량만 정산 시행 (현장 유용토 등의 미반입·미반출 토사는 정산 제외)

❍ 발생토의 중간적치장 운반량 작업일지 기재

- 발생토에 대한 중간적치장 운반량 및 현장 여건 변경에 따른 직접 되메우기량 등을 작업일보에 기재하여 정산시 참고자료로 활용

❍ 감독(감리)자는 발생토 처리과정 관리 철저

- 공사현장 발생토량 및 중간적치장 운반량, 잔토처리 과정 등에 대한 증빙자료 확보 철저(운반일시, 소요시간, 차량번호 등)

【 중간적치장 운영 철저 】

❍ 중간적치장 규모에 따른 시공 관리

- 중간적치장의 시설 규모를 감안한 사이클 타임(현장 ⇄ 중간적치장)을 파악하여 적정 물량이 운영되도록 조치

❍ 타공사와 공동사용시 공사건별 구역을 분리하여 발생토 관리

- 발생토(폐기물)가 섞이지 않도록 구역을 분리하여 관리하고 반입 반출 현황 관리 철저(이동식 칸막이 등의 간이시설 지양)