청계천~정릉천 자전거도로 연결공사 설계도서 검토 보고

번호	구 분	검 토 결 과	개략 공사비 (산출근거)	비 고
1	토 공 (정비구간)	현재의 진출입로가 정비구간 Sta.No 0+860지점에 있어 DT 24ton의 차량 진출입 시 기존 자전거도로 파손우려	계약 : 8,984천원
		변경) 정비구간 시점에 차량진출입로를 설치(추후 원상복구)하고 보행자 도우미를 배치	변경 : 25,460천원 (증 16,476천원)	서울시설공단 협의 필요
2	포장공 (정비구간)	당초에는 포장은 콘크리트 및 아스팔트 포장에 5㎝를 절삭 후 아스팔트로 덧씌우기가 계획되어 있음.	계약 : 27,021천원
		변경) 정비구간의 상태가 거의 전 구간 불량하여 전면보수의 내용이 실시설계 보고서 및 현장확인에서도 확인됨에 따라 전 구간 반사균열 대책 적용	변경 : 171,898천원 (증 144,877천원)
		설계사) 설계사에서 반사균열의 발생유무의 사항은 예측이 불가하다는 답변으로 하여 당초 공사비 적용		하자발생우려 매우 큼
3	안전관리비	당초 교통정리원 2인 1조 배치 10일 적용	계약 : 5,200천원
		변경) 교통정리원(A1,A2) 1개월 * 2명 보행자도우미(A1,A2,시종점) 4개월 * 2명	변경 : 78,019천원 (증 72,819천원)
4	부대공	가설사무실 및 가설창고를 컨테이너 6개월 미만 적용
		현재 임차 중인 비용으로 정산 (월 임대료 3,000천원)	변경 : 증 36,000천원
5	가시설공	변경) 말뚝박기 천공 및 교대 공사시 기존 청계천 사면 훼손에 따른 복구비용 추가반영	변경 : 질의 및 협의 중
6	부대공	변경) 환경관리 및 민원방지를 위한 사토 및 장비 진출로 세륜시설 (1톤트럭+고압살수기) 반영	변경 : 환경관리비로 정산	환경보존비 5,652천원
변경(증액) 합계			변경 : 311,377천원(증 270,172천원)