난지물재생센터 총인처리시설 설치사업 추진경위

○ ‘16.7. : 기본설계 준공(물재생시설과)

○ ‘17.2. : 실시설계 준공(도시기반시설본부)

○ ‘17.5. : 감리용역 계약((주)삼안)

○ ‘17.6. : 기존 무허가 건축물(16개동)에 대한 개발제한구역 관리계획 변경승인

○ ‘17.6. : 총인사업 난지 GB관리계획 경미한 변경 추진계획

- 총인사업 및 슬러지 건조시설 포함하여 GB관리계획 경미한 변경추진

○ ‘17.6. : 총인사업 난지 GB관리계획 경미한 변경 신청

- 총인처리시설 설치사업, 슬러지건조시설 설치사업

○ ‘17.7. : 난지 GB관리계획 경미한 변경 신청서 보완요청

- 슬러지시설 악취제거 계획, 향후 추가증축 계획 등

○ ‘17.7. : 난지 GB관리계획 경미한 변경 신청서 추가보완요청

- 추가확인된 미등재 건축물(21개동)에 철거이후 변경신청 요망

○ ‘17.8. : 보완요청(7.25) 사항 제출

- 추가확인된 기존 불법건축물(21개동)에 철거이후 변경신청 요망

○ ’17.8. : 공사계약(에이스건설(주))

○ ‘17.9. : 기존 건축물 대장등재 요청(16개동)

- 개발제한구역 법령 제정이전 존치 건축물로 ‘17.6월 중도위 심의 의결된 사항임.

○ ‘17.11. : 기존 건축물 대장등재 요청 회신

- 개발제한구역법령에 의하여 관리계획 승인 및 행위허가 득하여야 함.

○ ‘17.11.21 : GB관리계획 신청취하 및 재신청

- 기 신청사항 취하 및 난지 환경개선사업 추가하여 재신청

○ ‘17.11. : 기존 건축물 대장등재 요청 재회신

- 항공사진, 실시계획서류 등 확인결과 대장등재 추진, 대장 기재사항 제출요청

○ ‘17.12. : 기존 건축물 대장등재 재요청

- 건축물대장 기재사항 작성제출

○ ‘17.12. : 기존 건축물(계단실 등 16개동) 대장등재 완료 회신

○ ‘18.1. : GB관리계획 경미한 변경 신청 보완요청

- 토지조서 제출, 경관시뮬레이션 및 시설별 면적 작성

○ ‘18.1. : GB관리계획 경미한 변경 신청 보완자료 제출

○ ‘18.2. : GB관리계획 경미한 변경 신청 반려

- 건축물의 층수에 변경(2층 이상)이 있는 경우로 경미한 변경에 해당되지 않음.

※ 층수변경 사항은 국토부의 유권해석에 의한 사항으로 관련법규에 명시되지 않음.