1. 품질시험소 점검실적

□  추진실적

○ 점검기간 : ‘14년도 2/4분기

○ 점검실적

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완료	조치중
계	134	736	409	327
품질관리계획 적정성확인	50	614	318	296
품질시험계획 이행확인	36	82	65	17
품질관리 현장 확인 기동반	48	40	26	14

□ 분야별 점검실적

○ 품질관리 점검실적

품질관리계획 적정성 확인 : 50개 현장 (지적 614건)

〈점검대상〉

․ 총공사비 500억원 이상의 전면책임감리 대상 건설공사

․ 연면적 3만㎡ 이상 다중이용건축물의 건설공사

〈주요 지적사항〉

- 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 세부 추진계획)을 수립하고 추진실적을 관리하기 바람

- 교육훈련은 직무교육, 협력업체교육, 공통교육으로 구분하여 월별로 실적을 관리하기 바람

- 설계변경 사항에 대하여 공사참여자(협력사 포함)에게 교육실시 후 작업에 투입하기 바람

- 품질목표와 품질방침을 모든 공사 참여자가 이해하고 작업할 수 있도록 현장 내에 게첨하기 바람

- 철근에 부착된 시멘트페이스트는 부착력 감소의 원인이 되므로 제거후 콘크리트타설을 하기 바람

- 여름철 기온이 높을 경우 콘크리트 타설 후 급격한 건조 등으로 표면 균열이 발생하므로 비닐 덮기 등 양생관리를 잘하기 바람

- 콘크리트 수평, 수직 이어치기 부분 부착강도 증진을 위해 Chipping  실시 표면을 거칠게 하여 시공하기 바람

- 성토재료는 배수가 원활하고 압축성이 적은 재료를 사용하여 시공하기 바람

- 산벽마감 벽체 전면 노출부에는 흙을 채우기 전에 부직포를 설치하여 토사유출을 방지하기 바람

품질시험계획 이행확인 : 36개 현장 (지적 82건)

〈점검대상〉

․ 총공사비 30억원 이상 500억원 미만의 서울시와 투자기관 등에서 발주한 건설공사와 발주자가 품질시험계획의 이행확인을 의뢰한 공사

〈주요 지적사항〉

- 품질시험계획서의 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 시험성적서 대체 등으로 구분 바람

- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람

- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당 업무 및 전문분야를 등재

- 주요자재 검사 및 수불부는 책임감리 현장참여자 업무지침서 별지 제8호 서식으로 작성관리 바람

- 콘크리트 타설 현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를 수립 하고 콘크리트 균열에 대하여 관리하여야 하나 균열관리계획서 미수립

- 합벽구간 기존 벽체의 모르타르 제거후 콘크리트 타설하기 바람

- 이어치기부분 레이턴스, 골재알 등 제거후 콘크리트 타설하기 바람

- 구조물 뒷채움 구간 층다짐 등 정밀시공 하기 바람

- 벽체 재료분리 및 철근노출 부분 보수하기 바람

- 자연형 호안 사석 쌓기시 인터로킹(Interlocking)이 양호하게 시공하기 바람

- 기반암 노출 접속부 도로침하 방지를  위한 시공 상세도 작성 시공 바람

- 기둥 띠철근 한쪽 방향에는 90°갈고리 다른 쪽에는 135°이상 갈고리를

갖고 갈고리가 연속되지 않게 배근하기 바람

현장 확인 기동반 운영 : 48개 현장 (지적 40건)

〈점검대상〉

․ 서울시에서 발주하였거나 인․허가한 건설공사

․ 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰하는 건설공사

〈주요 지적사항〉

- 품질관리자는 건설기술인협회에 건설기술자 주요경력을 현재 근무처로 신고하고 담당업무를 품질관리로 등재 요망

- 건설기술관리법 시행규칙 제38조제2항 별표12에 의거 적정 시험실 면적 확보하기 바람

- 시험장비 목록 현황을 공정별로 분류하여 작성하기 바람

- 노면에 적치된 철근은 적당한 간격지지 및 녹 발생이 되지 않도록 관리하기 바람

- 구조물 콘크리트 타설대장 보완

- 철근에 부착된 콘크리트 페이스트 제거하기 바람

- 단열재사이 틈새는 충전재료로 밀실하게 충전하여 마감하기 바람

- 여름철을 맞아 균열발생이 저감되도록 서중콘크리트 시공계획 등을 별도 수립 시행하기 바람

※ 레미콘 시험 13건, 시료채취 40건(철근 31건, 타일 6건, 도로경계석 1,     시멘트1, 콘크리트벽돌 1)