1. 품질시험소 점검실적

□  추진실적

○ 점검기간 : ‘14년도 3/4분기

○ 점검실적

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완료	조치중
계	125	621	336	285
품질관리계획 적정성확인	40	476	217	259
품질시험계획 이행확인	37	80	61	19
품질관리 현장 확인 기동반	48	65	58	17

□ 분야별 점검실적

○ 품질관리 점검실적

품질관리계획 적정성 확인 : 40개현장 (지적 476건)

〈점검대상〉

․ 총공사비 500억원 이상의 전면책임감리 대상 건설공사

․ 연면적 3만㎡ 이상 다중이용건축물의 건설공사

〈주요 지적사항〉

- 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 세부 추진계획)을 수립  하고 추진실적을 관리하기 바람

- 2014년도 교육훈련 운영계획 중 협력업체 교육에 각 공종별 작업방법 및 절차에 대한 교육계획은 당해연도 추진공종을 중심으로 수립하고 해당공종  투입 전 교육을 실시한 후 작업에 투입될 수 있도록 조치 바람

- 설계변경 사항에 대하여 공사참여자(협력사 포함)에게 교육실시 후 작업에 투입하기 바람

- 현장 특성에 맞게 전 공종에 대한 공종별 작업지침을 수립하여 협력업체   시공계획 수립에 기준을 제시함으로써 품질관리에 미치는 영향을 최소화  할 수 있도록 현장관리 하시기 바람

- 터널 방수공 및 라이닝 콘크리트 타설 시 방수공의 손상이 없도록 유의 하시고 손상 부위는 라이닝 콘크리트 타설 전 반드시 보수 바람

- 조적시공부중 전선관 매입부가 단차 발생 등 쌓기 방법이 불량하니 초벌   미장 전 와이어메쉬 등으로 보완 후 마감처리바람

- 터널입구 벽면에 숏크리트 타설이 미흡한 부분은 빠른 시일 내 타설하여   작업 진동 및 토압에 의한 변위가 발생하지 않도록 조치 바람

- 말뚝기초와 직접기초가 인접한 부분의 부등침하(경계부)에 대한 대책을 보완(검토) 하시기 바람

- 상부차량 통행 보강용으로 설치한 지하 주차장 서포트는 보 지간의 1/4  지점 양단에 각각 설치되어야 하고 중앙에 1개만 설치하는 경우는 상․하층의  설치 위치를 반듯이 일치되도록 하여 전단균열이 생기지 않도록 조치바람

- 철근에 부착된 시멘트 페이스트는 부착력 감소의 원인이 되므로 반드시 제거 바람

- 옥상 외부 벽체 Con’c 타설시 설치한 폼타이의 구멍을 통해 내부에 매입된 폼타이가 부식되어 Con’c의 균열을 유발시킬 수 있는바 구멍을 철저히 사춤하여 부식되지 않도록 조치 바람

- 캐노피 물끊기 홈 길이를 조정하여 오염된 우수가 벽면을 타고 내려 오지 않게 하기 바람

품질시험계획 이행확인 : 37개 현장 (지적 80건)

〈점검대상〉

․ 총공사비 30억원 이상 500억원 미만의 서울시와 투자기관 등에서 발주한 건설공사와 발주자가 품질시험계획의 이행확인을 의뢰한 공사

〈주요 지적사항〉

- 품질시험계획서의 철근, 레미콘 등 주요자재는 규격별로 세분화하여 시험횟수를 산정하고, 시험횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체 등으로 구분 바람

- 시험·검사 실적보고서는 품질시험계획서에서 작성된 종목 및 규격별 모두 포함하여 작성하고 실적을 누계관리 하기 바람

- 품질관리자는 한국건설기술인협회에 근무지를 당해 현장으로 등재하고 담당 업무 및 전문분야를 등재하기 바람

- 콘크리트 타설현장은 착공과 동시에 현장여건에 맞는 균열관리계획서를   수립하고 콘크리트 균열에 대하여 관리하여야 하나 균열관리계획서 미수립

- 산벽 설치구간 하부 산책로로 우기시 토사가 흘러내리지 않도록 시공계획을 수립 시행하기 바람

- 이어치기부분 레이턴스, 골재알 등 제거후 콘크리트 타설하기 바람

- 옥상 난간벽체 재료분리 부분 무수축 모르타르로 보수 바람

- 벽체 재료분리 및 철근노출 부분 보수하기 바람

- 북부검수고 증설부분 PHC파일 시공시 장비주행성(trafficability) 확보 등 파일 정밀시공을 위해 연약지반처리(치환)후 시공하기 바람

- 시점부 접속교 슬래브 PF(Precast beam)부 철근피복 두께 유지를 위한 스페이서 설치 바람

- 기둥 띠철근 한쪽 방향에는 90°갈고리 다른 쪽에는 135°이상 갈고리를   갖고 갈고리가 연속되지 않게 배근하기 바람

현장확인 기동반 운영 : 48개 현장 (지적 65건)

〈점검대상〉

․ 서울시에서 발주하였거나 인․허가한 건설공사

․ 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰하는 건설공사

〈주요 지적사항〉

- 품질관리자는 건설기술인협회에 건설기술자 주요경력을 현재 근무처로 신고하고 담당업무를 품질관리로 등재 요망

- 중계펌프장 배수관 부설 후 되메우기 시 다짐이 다소 미흡한 바, 시방규정에  따라 다짐관리 하기 바람

- 현장내 발생되는 작업용수 등 외부 유출되지 않도록 보완

- 면목4동 배수관로 설치공사 구간 중 도로 침하부분(동2로 횡단부분)에 대하여 조치 바람

- 콘크리트 잔재 제거 및 재료분리 보수

- 철근에 부착된 콘크리트 페이스트 제거하기 바람

- 맨홀내 돌출된 오수관 제거 요망

- 호우시 철근 등이 빗물에 유입되지 않도록 현장 사용자재의 관리 철저

※ 레미콘 시험 5건, 시료채취 38건(철근 29건, 타일 6건, 단열재 2건, 인터록킹 블록 1건)