문서번호	한양도성연구소-227
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	한양도성연구소장	서울역사박물관장
협 조	경영지원부장
	학예연구부장
	총무과장
	시설과장
	전시과장
	교육대외협력과장
	조사연구과장
	유물관리과장
	보존과학과장

한양도성박물관 상설전시 확대개편

전시설계 및 전시물 제작 설치 계획(안)

2016

서울역사박물관

(한양도성연구소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	*	□	자문회의 개최 후 의견 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

한양도성박물관 상설전시 확대개편

전시설계 및 전시물 제작 설치 계획(안)

2016년 하반기 실사단 방문에 대비하여 현 한양도성박물관의 상설전시의 전시공간 확충 및 전시 콘텐츠 보강하여, 한양도성의 전시 및 순성 안내시설을 확충하고 2017년 유네스코 세계유산 등재를 지원하고자 함

1		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 한양도성박물관 상설전시 확대개편 전시설계 및 전시물 제작 설치

○ 사업기간 : 2016. 2. ~ 2016. 11

○ 사업대상 : 서울시 종로구 율곡로 283 디자인지원센터 1~3층 한양도성박물관

(3층 상설전시실, 2층 휴게공간 및 복도, 1층 기획전시실 및 로비 등)

○ 사업내용 : 상설전시 확대개편 전시설계 및 전시물 제작·설치

○ 사업예산 : 960,000천원

○ 관련근거

- 시장요청사항(’15.2.10 및 6.23)

: “협소한 한양도성박물관을 확대 이전하여 제대로 된 박물관을 설립하되 내년 현지실사 전까지 현 건물 내에서 전시공간을 확대하는 방안을 우선 추진”

- 「한양도성 전시․안내 네트워크 구축 계획」(시장방침 제242호, 한양도성도감-2236호, ’15.09.05) : 한양도성 전시․안내시설 확충의 일환으로 현 한양도성박물관을 상설전시․체험공간 확대 및 전시 콘텐츠 개편

- 「한양도성박물관 확대개편 기본계획 수립(안)」(한양도성연구소-3567, 2015.10.08) 및 확대개편 기본계획(2015. 12. 22)

2		추 진 경 위

○ 2014.10.14        한양도성박물관 확대건립 방안 보고

○ 2015.01.29        「한양도성박물관 확대건립 시 전시방안」 부시장 보고

○ 2015.02.10/ 06.23  시장요청사항 “현 한양도성박물관 확대개편 방안 추진”

○ 2015.05.01        남산 교육연구정보원 이전방안 검토(문화체육관광본부)

○ 2015.05.06        「한양도성박물관 전시실 확대 개편 계획」 시장보고

○ 2015.09.05        한양도성 전시․안내 네트워크 구축 계획(한양도성도감)

○ 2015. 10.08       한양도성박물관 확대 개편 기본계획 수립(안) 방침

○ 2015. 12.22       한양도성박물관 확대 개편 기본계획 수립

3		추 진 방 향

○ 협소한 한양도성박물관의 상설 전시공간을 확충하여 시민들의 전시관람 환경을 개선

: 3층 화장실 철거, 1층 기획전시실, 2층 휴게공간 및 복도 활용

○ 한양도성 관련 기획전 및 기록자료 조사 성과를 활용한 축성의 과정, 도성 관리, 생활사 등 전시 스토리라인 강화

○ 1, 2, 3층의 수직적으로 분리된 공간 구조와 이원화된 출입 방향을 개선

○ 유네스코 세계유산 현지 실사단 방문 이전에 전시물 제작 설치 우선 완료

: 준공 전 시험가동을 통해 사업의 완성도 제고

○ 분야별 전문가의 고증, 자문을 통해 전시물 제작 수준을 높이고, 기존 전시콘텐츠 및 전시시설을 효과적으로 활용하여 전시물 제작 설치 비용 절감

○ 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)을 통해 전문성과 역량을 갖춘 업체를 선정하여 전시 내용을 충실하게 구현

4		세부 추진계획

□ 상설전시 확대개편 전시설계 및 전시물 제작 설치 용역

○ 용역 개요

- 사 업 명 : 한양도성박물관 상설전시 확대개편 전시설계 및 전시물 제작 설치 용역

- 대상공간 : 한양도성박물관 1~3층(총 972.84㎡)

(3층 상설전시실, 2층 휴게실 및 복도, 1층 기획전시실 및 로비 등 부대공간)

3층 상설전시실	2층 휴게실 및 복도	1층 기획전시실 및 로비

- 과업내용 : 상설전시 전시설계 및 전시물(전시시설, 전시보조물, 모형, 영상, 그래픽, 전기공사 등) 제작 설치

- 과업기간 : 계약일 ∼ 2016년 11월 15일

- 소요예산 : 950,000천원(VAT 포함)

대주제		내용
		중주제	소주제
Part Ⅰ	서울, 한양도성	1. 수도 서울의 울타리, 한양도성	600년 넘은 도시성곽
			서울 한양도성 현황
			한양도성의 특징과 가치
		2. 한양도성 순성	순성의 전통
			순성 구간
			디지털 순성
Part Ⅱ	한양도성의 건설과 관리	1. 수도 한양의 시작	조선의 건국과 한양천도
			도성 조형의 원리
		2. 한양도성의 건설	성돌과 석재산지
			한양도성을 쌓고 수리한 사람들
			도성 축조술의 변화
		2. 완성된 한양도성	한양을 둘러싼 성벽
			사대문과 사소문
			기타 시설물
		3. 한양도성의 재정비	무너진 도성의 재정비
			도성 수비체제의 강화
		4. 도성의 관리와 생활	성문의 개폐와 운영
			도성의 유지와 관리
			도성의 순라
			서울 사람의 하루
Part Ⅲ	한양도성의 훼철과 복원	1. 도성수난사	외국인이 본 한양도성
			신문물의 등장과 도성
			식민지 정책과 도성의 파괴
			관광명소가 된 한양도성
			서울의 재건과 도성의 훼손
		2. 도성보전의 노력	복원의 시작과 노력
			땅 속에서 찾은 한양도성
			시민의 품으로 돌아온 한양도성
		3. 도성에 기대어 사는 사람들	성곽마을

○ 상설전시 확대개편 전시 구성(안)

※ 위 구성안은 전시설계 및 전시물 제작 설치 과정에서 일부 변경될 수 있음

○ 주요 과업 내용

- 전시연출 설계 및 실시설계, 도면 및 지침 작성

- 기존 전시물 및 시설 철거, 이전 등

- 전시시설 및 전시보조물 제작 설치

- 전시유물, 사인그래픽, 모형 연출, 영상 S/W, H/W 등 전시물 제작 설치

- 전시공간에 필요한 부대시설 공사(전기, 조명, 음향, 소방, 장애인 관련시설 등

- 전시 내용 고증 및 제작 방법 등 자문

- 전시물, 전시보조물 시험가동 및 운영 안정화, 운영 매뉴얼 작성

- 준공도면 작성 및 원가계산서 및 산출내역서 작성

□ 계약방법 및 사업자 선정

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

- 관련근거

․  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 1항, 제44조(대통령령 제25840호, 2014.12.9)

※ 협상에 의한 계약 사유 : 전문성 확보

■ 박물관 전시는 전문성과 모형 ․ 작동장치 ․ 영상 등 창의적 물품제작이 큰 비중을 차지하는 대중적 작품이므로 설계자의 의도구현이 관건임

■ 구체적인 제안서 및 설계도면 ․ 내역서 등을 통해 전시업체를 선정함으로써 가격경쟁보다 전시의 질적인 내용을 우선시하여 평가할 수 있음

■ 제안서 평가위원회의 결과에도 불구하고 우선협상순위 업체 및 이하순위 업체와 협상 절차를 통해 박물관과 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약할 수 있음

․  지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 제1절 ‘9. 물품 및 용역의 구매규격 사전공개(행정자치부 예규 제35호, ’15.12.29 개정, 시행 ’16. 1.11)

○ 사업자 선정 방법 : 공개경쟁(제안서 평가)

- 국가종합전자조달시스템(www.g2b.go.kr), 서울시 홈페이지를 통한 공개 모집

- 업체가 제출한 제안서를 평가위원들이 평가한 결과에 따라 최고 득점한 협상대상자와 우선 협상 후 계약체결

○ 참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 업체로서 다음의 각 조건을 모두 갖추어야 함

① 「산업디자인진흥법」 제9조에 의거 관할청에 신고를 필한 산업디자인전문회사 (환경디자인분야 또는 환경디자인분야를 포함한 종합디자인분야)

② 공고일 현재 「중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률」의 규정에 의한 중소기업자로서 직접생산증명서(실물·모형)를 소지한 업체

③ 「건설산업기본법」제9조 및 동시행령 제7조에 의한 실내건축공사업 등록업체

④ 「전시산업발전법」 제7조에 따라 전시사업자로 등록된 업체

⑤ 최근 3년간(공고일 기준) 국가 또는 지방자치단체, 정부투자기관 또는 지방공 기업·지방자치단체 출자기관, 민자 또는 민간 발주로 시행한 박물관(미술관), 전시관 등 전시물 제작 설치 단일 실적이 3억 원(부가가치세 포함) 이상인 업체

○ 업체선정절차

구매규격 사전공개 ※나라장터	⇨	입찰공고의뢰 및 입찰공고 ※본청 재무과	⇨	질의 답변	⇨	입찰등록 및 제안서접수	⇨	제안서 평가	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결
`16.1.28～2.2 (5일간)		`16.2.3～2.4		20일간		`16.2.24		`16. 2.26		`16.2.26～2.29		`16.3.1~

※ 위 추진일정은 사정에 따라 변동될 수 있음

○ 제안서 평가 및 선정방법

- 평가방법 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준의 규정(안전행정부예규 제73호, 2014.2.7.) 및 「협상에 의한 계약제도 공정성 강화대책」 (재무과-617733, ’15.12.13, 서울시장방침 제376호)에 의거 평가위원회 구성, 제안서 평가와 협상적격자 및 협상순위 결정

- 평가기준 : 기술능력평가[정량적평가분야, 정성적평가분야], 가격평가[입찰가격평가분야] 등을 실시하여 총 100점이 만점이 되도록 함

① 정량적평가분야 : 20점(구비서류에 대한 내부평가)

․  평가자 : 계약담당자

․  확인자 : 평가위원장

․  평가기준 : 재무현황, 실적건수 및 금액 등

② 정성적평가분야 : 60점(사업제안서 PPT를 통한 평가위원회 평가)

․  평가위원 구성 : 7인∼10인 이내

․  평가방법 : 제안서 보고회(프레젠테이션)을 통한 평가

․  평가기준 : 각 평가항목에 대한 위원별 개별 평가

③ 입찰가격평가 : 20점(가격 평점산식에 의한 평가)

※ 심사기준 등 세부평가내용은 별도 <제안서 평가위원회 개최 계획> 수립

5		추 진 일 정

○ 2016. 1 ~  2 : 계획수립 및 구매규격 사전공개, 입찰공고 및 우선협상 대상자 선정, 협상 및 계약 체결

○ 2016. 3 ~  5 : 전시설계 및 영상, 모형, 전시 그래픽 등 전시물 제작

○ 2016. 5 ~  8 : 3층 상설전시실 폐관 및 전시시설 공사

○ 2016. 8      : 영상, 모형, 그래픽, 유물 등 전시물 설치

○ 2016. 9 ~ 10 : 재개관 및 시험가동, 전시 안정화

6		소요예산 및 집행 방법

○ 소요예산 : 960,000천원

○ 예산과목 : 역사와문화의 복합공간 창조, 한양도성전시관 운영, 한양도성박물관·연구소 운영, 시설비(401-01)/ 사무관리비(201-01)

(단위 : 천원)

예산과목		내 역		예산액 (천원)
시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	○ 전시설계 및 전시물 제작 설치 - 전시설계 - 전시시설물, 모형, 진열장, 영상, 그래픽 등 제작	850,000	950,000
일반운영비	사무관리비 (201-01)	○ 전시설명 원고료 및 번역, 사진 및 영상 저작권료, 보고서 발간 등	100,000
일반운영비	사무관리비 (201-01)	○제안서 평가회 개최 ○전문가 자문수당 등	10,000	10,000

○ 예산 집행방법

- 한양도성박물관 상설전시 확대개편 전시설계 및 전시물 제작 설치 용역

: 협상에 의한 계약(제한경쟁입찰)

- 자문위원회 개최 등 기타 운영비

: 평가수당 등 일반지출, 1,000만원 이하 일상경비로 교부받아 집행 후 정산

7		행 정 사 항

○ 총무과 : 예산집행 지원

○ 시설과 : 영상(H/W, S/W) 관련 자문, 설계도 검토 및 공사감독 지원

○ 전시과 : 전시콘텐츠 검토 및 제작 지원

○ 교육대외협력과 : 보도자료 및 전시홍보 지원

○ 조사연구과 : 생활문화자료조사 관련 자료 제공 협조

○ 유물관리과 : 소장유물 대출 협조 및 유물사진 자료 제공

○ 보존과학과 : 상설전시실 전시환경 점검 및 유물 보존처리 협조

8		성 과 지 표

○ 11. 관람 환경의 적정성, 16. 전시기획 및 운영.  끝.