첨부1

난지물재생센터 시설비 사업별 세부시행계획

■ 총괄                                                      (단위 : 백만원)

구분	건수	사업 금액(백만원)	비 고
계	25	11,356
기 전 분야	17	6,846
시설물 분야	8	4,510

■ 기전사업                                                 (단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	예산액	사업기간	사업방법
	합 계	17건	6,846
1	수처리분야 소규모수선	물재생 기계 ·전기 소규모 수선 1식	500	2015.1.~12.	제한경쟁
2	#2송풍기동 수배전반 교체	․특고및고압반(VCB,LBS반) 9면 ․변압기반3면 ․저압반8면	616	2015.3~10	제한경쟁
3	송풍기 분해정비	․임펠라분해정비2대 ․모터분해정비및절연보강2대 ․기동저항반점검․정비2대	100	2015.2~7	수의계약
4	유입펌프장 모터펌프 교체	‧모터퍼프2대교체	500	2015.1~10	제한경쟁
5	유입펌프장 침사인양기 교체	․ 침사인양기 2대 교체	500	2015.1~8	제한경쟁
6	2처리장 반송슬러지펌프 교체	․펌프(22KW)6대 ․기계배관공사1식 ․전기설비공사1식 ․철거및설치1식	400	2015.3~9	제한경쟁
7	슬러지재활용 시설 소규모 수선	슬러지처리분야기계․전기소규모수선1식	390	2015.1~12	전자공개 등
8	주변전실 수배전반 교체	노후수배전반7면교체	210	2015.1~7	제한경쟁
9	농축기 설치	탈수기동농축기설치(2대)	900	2015.1~8	제한경쟁
10	슬러지1처리장 수배전반 교체	노후수배전반42면교체	270	2015.1~7	제한경쟁
11	열교환기 고저온수 탱크 교체	온수탱크5개및펌프7대교체	350	2015.2~8	제한경쟁
12	농축슬러지 수집기 보수	슬러지수집기 스크래파 및 구조물 교체	400	2015.3~9	제한경쟁
13	소규모수선 사업	위생처리,슬러지소각,탈수시설등 소규모 수선 1식	80	2015.1.~12.	제한경쟁
14	종합협잡물 처리기 교체	종합협잡물처리기 1대 교체	380	2015.5.~8.	조달구매
15	공기예열기 튜브 및 내화물 교체	유동공기예열기 튜브 및 내화물 교체	400	2015.3.~6.	제한경쟁
16	세정감습탑 교체	세정감습탑 1대 교체	450	2015.3.~6.	제한경쟁
17	슬러지 소각시설 산기관 교체	소각로 산기관(96m)노즐(237)개 교체	400	2015.3.~6.	제한경쟁

■ 시설사업                                                  (단위 : 백만원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	예산액	사업기간	사업방법
	소 계	8건	4,510
1	난지수계 차집관거 준설 및 정비	준설 3,000㎥, 맨홀정비 30개소, 관로정비 1,400m	1,800	2015.4 ~12	제한경쟁
2	센터내 시설물 보수	아스팔트포장 3.5a, 배수로정비 3,000㎥	480	2015.3~12	제한경쟁
3	건축시설물 유지관리 보수	단면보수 600㎡, 각종 건축마감재 보수	480	2015.3~12	제한경쟁
4	1처리장 최초침전지 보수	단면보수 3,650㎡, 비계설치 600㎡	800	2015.4~10	제한경쟁
5	관사리모델링 공사	직원관사 26세대 리모델링	800	2015.4~12	제한경쟁
6	제1,2처리장 정밀안전진단용역	토목, 건축 시설물 정밀안전점검 용역	50	2015.4~10	제한경쟁
7	건설폐기물 처리용역	폐기물 운반 900㎥, 폐기물 처리 1,682톤	50	2015.3~12	제한경쟁
8	노후 상수도관 개선 용역	센터내 노후상수도관 정확도 개선용역	50	2015.4~10	제한경쟁

1	수처리 기계․전기 소규모 수선

노후, 마모로 인한 고장발생과, 기능이 저하된 수처리 설비를 적기에   보수하여, 시설물의 안정적인 유지관리로 최적기능 유지함으로써, 기전시설물의 고장을 예방하여 가동률을 증대하고 안정적인 물재생 업무에 온 힘을 기울이고자 함.

□ 사업개요

○ 규   모  : 제1, 2처리장 및 상암유입펌프장 기전시설물

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 500백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01.  : 설계 및 계약심사 의뢰

◦  '15. 02.  : 발주 및 계약

◦  '15. 02. ~ 12.31.  : 공사시행

◦  '15. 12.  : 시운전 및 준공검사

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500		500
공사비	500		500

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 우배용(☎300-8584)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

2	송풍기동 수배전반 교체

장기간 사용 및 하수가스 노출로 노후, 부식된 수배전반을 교체하여

불시 발생 할 수 있는 전기설비의 안전사고 사전예방 및 안정적인

전력공급으로 송풍기동 운영에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 송풍기동 수배전반 20면 제작구매 설치

○ 사업기간 : '15. 03. ~ '15. 10.

○ 총사업비 : 616백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 03.～04. : 설계 및 계약심사 의뢰

○  '15. 05. : 발주 및 계약

○  '15. 06. ~ 10. : 사업시행

○  '15. 10. : 시운전 및 준공검사

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	616					616
공사비	616					616

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이호복(☎300-8581)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

3	송풍기 분해정비

송풍기는 고속회전기로 노후가 급속도로 진행되며 고압모터의 절연저하로 부품교체 및 보정을 위한 정비가 정기적(4년주기)으로 필요한 설비로,

분해정비를 시행하여 송풍기의 운전효율을 향상시키고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 제1,2처리장 총14대 중 2대 분해정비

○ 사업기간 : '15. 02. ~ '15. 07.

○ 총사업비 : 100백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 02.  : 설계 및 계약심사 의뢰

○  '15. 03.  : 발주 및 계약

○  '15. 04. ~ 07.  : 분해정비 시행

○  '15. 07.  : 시운전 및 준공검사

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	100			100
공사비	100			100

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이호복(☎300-8581)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

4	유입펌프장 모터펌프 교체

내용연수 초과에 따른 노후로 기능이 저하된 모터펌프를 연차적 계획에 의거 교체하여 안정적인 하수처리 기능 유지

□ 사업개요

○ 규   모  : 모터펌프 22대

- 보유수량 : 1펌프장 12대(1987), 2펌프장 10대(1997)

- 대상수량 : 2대(설치년도 1987년)

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 10.

○ 총사업비 : 500백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01 ~ 02  : 설계 및 계약심사

◦  '15. 02 ~ 03  : 발주 및 계약

◦  '15. 04 ~ 10  : 제작설치

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500				250						250
공사비	500				250						250

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 유영욱(☎300-8561)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(8502)

5	유입2펌프장 침사인양기 정비

침사인양기 권상장치 노후화로 침사인양 효율성이 낮으며 안전사고 우려가 있기에 조속히 교체하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모

- 보유수량 : 5대(설치년도 1997)

- 대상수량 : 2대

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 8.

○ 총사업비 : 500백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01 ~ 02  : 설계 및 계약심사

◦  '15. 02 ~ 03  : 발주 및 계약

◦  '15. 04 ~ 08  : 제작설치

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	500				250				250
공사비	500				250				250

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 유영욱(☎300-8561)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(8502)

6	2처리장 반송슬러지 펌프 교체

고도처리시설 설치로 생물반응조의 MLSS 운영기준이 상향됨에 따라

기존의 반송슬러지 처리 시설로는 종침계면의 불균형으로 수질관리에

어려움이 있어, 슬러지 인발을 개별(지별)적으로 운영하기 위하여

반송슬러지 펌프의 추가설치 필요

□ 사업개요

○ 규   모  : 제2처리장 최종침전지 반송펌프 6대 설치

○ 사업기간 : '15. 03. ~ '15. 09.

○ 총사업비 : 400백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 03. ~ 04. : 설계 및 계약심사 의뢰

○  '15. 05.  : 발주 및 계약

○  '15. 06. ~ 09.  : 공사시행

○  '15. 09.  : 시운전 및 준공검사

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400					400
공사비	400					400

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김지영(☎300-8583)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

7	슬러지처리 기계․전기 소규모 수선

노후, 마모로 인한 고장발생과, 기능이 저하된 수처리 설비를 적기에 보수하여, 시설물의 안정적인 유지관리로 최적기능 유지함으로써, 기전시설물의 고장을 예방하여 가동률을 증대하고 안정적인 슬러지처리 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 규   모  : 슬러지1, 2처리장 및 주변전실 기전시설물

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 390백만원

□ 세부추진계획

○'15. 02 ~ 12.31  : 설계 및 계약심사 의뢰

○'15. 01 ~ 12.31  : 발주 및 계약

○'15. 01 ~ 12.31  : 공사시행 및 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획 : 연간 수시집행               단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	390
공사비	390

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 홍징의(☎300-8543)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

8	주변전실 수배전반 교체

주변전실의 노후 수배전반을 교체하여 안정적인 전력공급 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 주변전실 수배전반 7면 교체

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 06.

○ 총사업비 : 210백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01.  : 설계

◦  '15. 02.  : 발주 및 계약

◦  '15. 06.  : 납품완료

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
교체시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	210						210
공사비	210						210

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김광모(☎300-8542)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

9	농축기 설치

고도처리공법(MLE→A2O공법)전환에 따른 통합반류수 설비의 잉여슬러지를 직접 농축/탈수 처리하여 안전정인 방류수질 확보

□ 사업개요

○ 규   모  : 탈수기동 농축기 설치(2대)

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 08.

○ 총사업비 : 900백만원

□ 세부추진계획

○'15. 02  : 설계 및 계약심사 의뢰

○'15. 03  : 발주 및 계약

○'15. 08  : 사업시행 및 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획 : 연간 수시집행               단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	900								900
공사비	900								900

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 홍징의(☎300-8543)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

10	슬러지1처리장 수배전반 교체

슬러지1처리장의 노후 수배전반을 교체하여 안정적인 전력공급 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 슬러지1처리장 수배전반 42면 교체

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 06.

○ 총사업비 : 270백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01.  : 설계

◦  '15. 02.  : 발주 및 계약

◦  '15. 06.  : 납품완료

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
교체시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	270						270
공사비	270						270

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김광모(☎300-8542)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

11	고․저온수 탱크 및 펌프 교체

내구연한 경과 및 노후로 부분누수가 발생하고 있는 고․저온수조 탱크 및 부대시설(펌프 및 배관)을 교체하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 규   모  : 저온수탱크(6대) 및 펌프교체

○ 사업기간 : '15. 02. ~ '15. 08.

○ 총사업비 : 350백만원

□ 세부추진계획

○'15. 02  : 설계 및 계약심사 의뢰

○'15. 03  : 발주 및 계약

○'15. 08  : 사업시행 및 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획 : 연간 수시집행               단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	350								350
공사비	350								350

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 홍징의(☎300-8543)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

12	농축슬러지수집기 교체

내구년한 경과 및 장기간 사용으로 노후되어 기능이 현저히 저하된 농축슬러지수집기를 교체하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 슬러지수집기 교체(2대)

○ 사업기간 : '15. 03. ~ '15. 09.

○ 총사업비 : 400백만원

□ 세부추진계획

○'15. 03  : 설계 및 계약심사 의뢰

○'15. 04  : 발주 및 계약

○'15. 09  : 사업시행 및 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획 : 연간 수시집행               단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400								400
공사비	400								400

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 홍징의(☎300-8543)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

13	정화조 오니처리 소규모 수선

장기간 가동에 따른 노후․마모로 잦은 고장발생과 기능이 저하된 기계․전기설비를 적기에 보수하고, 유사시 신속한 대처로 정화조오니처리시설 등의 최적기능 유지

□ 사업개요

○  규    모 : 위생처리시설외 3개시설 소규모 정비

○ 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 80백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01.~ 10  : 설계 및 계약심사

◦  '15. 02 ~ 10  : 발주 및 계약

◦  '15. 02 ~ 12  : 제작 및 공사시행

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	80		10	10	10	10	10	10		10		10
공사비	80		10	10	10	10	10	10		10		10

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이진호(☎300-8546)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

14	종합협잡물 처리기 교체

내구년한이 경과되어 노후․부식으로 잦은 고장이 발생되고 있는 협잡물종합처리기를 적기에 교체하여 안정적인 분뇨처리공정 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○  규    모 : 종합협잡물 처리기(150㎥/h)1대 교체

○ 사업기간 : '15. 05 ~ '15. 8

○ 총사업비 : 380백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 03 ~ 04  : 방침 및 설계

○  '15. 05 ~ 06  : 발주 및 계약

○  '15. 06 ~ 08  : 제작 및 설치

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	450					150			300
공사비	450					150			300

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이진호(☎300-8546)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

15	공기예열기 튜브 및 내화물 교체

유동공기예열기의 장기간 사용에 따른 소각재 및 고온의 산성 배기가스에 의한 튜브 및 내화물의 마모 및 균열 발생으로 기능이 저하된 시설물을 적기에 교체하여 안정적인 소각시설 운영

□ 사업개요

○  규    모 : 유동공기예열기 튜브 및 내화물 교체

○ 사업기간 : '15. 03 ~ '15. 6

○ 총사업비 : 400백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 01 ~ 02  : 설계 및 계약심사

○  '15. 02         : 발주 및 계약

○  '15. 03 ~ 06  : 제작 및 설치

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400			150			250
공사비	400			150			250

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이진호(☎300-8546)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

16	세정감습탑 교체

노후(부식 및 마모)된 세정감습탑을 적기에 교체 하여 대기오염물질 누출 방지로 대기환경보전법 준수와 안정적인 소각시설 운영에 만전을 기하고자함.

□ 사업개요

○  규    모 : 슬러지처리(소각)시설 세정감습탑(12,000m3/hr) 1대 교체

○ 사업기간 : '15. 03 ~ '15. 6

○ 총사업비 : 450백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 01 ~ 02  : 설계 및 계약심사

○  '15. 02         : 발주 및 계약

○  '15. 03 ~ 06  : 제작 및 설치

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	450			150			300
공사비	450			150			300

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이진호(☎300-8546)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

17	슬러지소각시설 산기관 교체

장기간 가동에 따른 노후 부식으로 잦은 고장 발생 및 공기가 누설되고 있는 소각로 내의 산기관을 교체하여 안정적인 소각시설 운영에 만전을 기하고자함.

□ 사업개요

○  규    모 : 소각로 산기관 1SET 교체

○ 사업기간 : '15. 03 ~ '15. 6

○ 총사업비 : 400백만원

□ 세부추진계획

○  '15. 01 ~ 02  : 설계 및 계약심사

○  '15. 02         : 발주 및 계약

○  '15. 03 ~ 06  : 제작 및 설치

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	400			150			250
공사비	400			150			250

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 이진호(☎300-8546)	슬러지재활용과장 : 김웅남(☎300-8540)	소장 : 가길현(☎300-8502)

1	난지수계 차집관거 준설 및 정비

7개 자치구에 위치한 총 연장 93km 차집관거 유지 보수를 통한 차집관거의 안전한 기능유지

□ 사업개요

○ 규   모  : 차집관로 L = 93km

○ 사업기간 : '15. 04. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 1800백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01. ~ 02 : 물량 산정 및 설계

◦  '15. 03. ~ 04 : 계약심사 및 발주

◦  '15. 04. ~ 12.31.  : 공사시행

◦  '15. 12.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,800			540			540						720
공사비	1,800			540			540						720

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 권순회(☎300-8590)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

2	센터내 시설물 보수

센터내 시설물의 긴급보수 및 상시적인 유지관리를 통한 하수처리 시설물의 기능 유지로 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 제1, 2처리장 토목시설물 전체

○ 사업기간 : '15. 03. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 480백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01.  : 설계

◦  '15. 02.  : 발주 및 계약

◦  '15. 03. ~ 12.31.  : 공사시행

◦  '15. 12.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	480			144			144						192
공사비	480			144			144						192

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김민호(☎300-8558)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

3	건축시설물 유지관리 보수

센터내 건축물의 긴급보수 및 상시적인 유지관리를 통한 하수처리 시설물의 기능 유지로 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 제1, 2처리장, 상암유입 및 오수펌프장 건축시설물

○ 사업기간 : '15. 03. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 480백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01.  : 설계

◦  '15. 02.  : 발주 및 계약

◦  '15. 03. ~ 12.31.  : 공사시행

◦  '15. 12.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	480			144			144						192
공사비	480			144			144						192

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 박재춘(☎300-8589)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

4	1처리장 최초침전지 보수

시설물 노후, 유해가스에 따른 콘크리트의 부식, 열화, 탈락된 시설물 보수로 시설물의 안전한 유지관리

□ 사업개요

○ 규   모  : 제1처리장 최초침전지

○ 사업기간 : '15. 04. ~ '15. 10.

○ 총사업비 : 800백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01. ~ 02 : 물량산정 및 설계

◦  '15. 03. ~ 04 : 발주 및 계약

◦  '15. 04. ~ 10 : 공사시행

◦  '15. 10.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	800				240		240				320
공사비	800				240		240				320

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김민호(☎300-8558)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

5	관사 리모델링 공사

노후도(누수, 백태, 파손 등)가 상당한 관사아파트를 세대별로 내부 개보수를 시행함으로써 직원 근무의욕 상향과 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 규   모  : 지상 5층/ 지하 1층, 2개동 82세대 중 26세대 개보수

○ 사업기간 : '15. 04. ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 800백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01. ~ 02 : 물량산정 및 설계

◦  '15. 03. ~ 04 : 발주 및 계약

◦  '15. 04. ~ 12 : 공사시행

◦  '15. 12.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	800				240		240				320
공사비	800				240		240				320

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 박재춘(☎300-8589)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

6	제1, 2처리장 정밀안전점검 용역

센터내 토목, 건축 시설물에 대한 정밀안전점검을 실시하여 시설물의 기능 상태를 파악하고, 취약부분에 대한 보수․보강 방안을 마련하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 규   모  : 유입펌프장외 85개 시설

○ 사업기간 : '15. 04. ~ '15. 10.

○ 총사업비 : 50백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01. ~ 02 : 물량산정 및 설계

◦  '15. 03. ~ 04 : 발주 및 계약

◦  '15. 04. ~ 10 : 공사시행

◦  '15. 10.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50				15		15				20
공사비	50				15		15				20

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김민호(☎300-8558)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

7	건설폐기물 처리용역

센터에서 시행하는 건설공사(차집관거 정비, 센터 건축, 토목시설물 정비공사)에서 발생되는 건설폐기물을 적정하게 처리

□ 사업개요

○ 규   모  : 폐기물 운반 900톤, 처리 1,682㎥

○ 사업기간 : '15. 03 ~ '15. 12.

○ 총사업비 : 50백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01. : 물량산정 및 설계

◦  '15. 02. : 발주 및 계약

◦  '15. 03. ~ 12 : 공사시행

◦  '15. 12.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50				15		15						20
공사비	50				15		15						20

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김민호(☎300-8558)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)

8	노후 상수도관 개선용역

노후 상수도관 정확도 개선, 도면 전산화로 노후관 정비계획 수립 및 상수도의 효율적인 유지관리

□ 사업개요

○ 규   모  : 노후상수도관 6km

○ 사업기간 : '15. 04. ~ '15. 10.

○ 총사업비 : 50백만원

□ 세부추진계획

◦  '15. 01. ~ 02 : 물량산정 및 설계

◦  '15. 03. ~ 04 : 발주 및 계약

◦  '15. 04. ~ 10 : 공사시행

◦  '15. 10.  : 준공

□ 추진일정

공정내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비 고
설계 및 발주
공사시행

□ 예산 조기집행계획                              (단위 : 백만원)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	50				15		15				20
공사비	50				15		15				20

작 성 자	난지물재생센터	담당 : 김민호(☎300-8558)	물재생과장 : 김일운(☎300-8580)	소장 : 가길현(☎300-8502)