○ ○ 구역 주택재개발정비사업(임대주택매입)

<재개발사업 특별회계>

□  사업목적

○  주택재개발구역내 거주하는 세입자의 주거안정 도모 및 주거환경개선

□  사업개요

○  위    치 : ○○구 ○○동 ○○번지 일대

○ 사업기간(착공일~준공예정일) : 2016.12월 ~ 2019.6월(00개월)

○ 사업규모

• 전체사업규모

- 부지면적 : 31,964㎡

- 건축계획 : 지하 2층/지상 24층이하 아파트 7개동 426세대

• 임대아파트 건립 사업규모

- 지하 2층/지상 15층이하 아파트 1개동, 73세대, 연면적 5,556.28㎡

○ 기타(평형별 세대 수 등)

규 모	세대수	전 용 면 적	주거공유 면 적	공 급 면 적	기타공용면적			계 약 면 적
					전기실 등	주차장면적	소 계
56형		56.87	26.04	82.91	5.36	31.81	37.17	120.08
57A		57.78	26.57	84.35	5.45	32.31	37.76	122.11
57B		57.88	28.02	85.90	5.46	32.37	37.83	123.73
57C		57.96	28.16	86.12	5.46	32.42	37.88	124.00
59A		59.70	27.27	86.97	5.63	33.39	39.02	125.99
59B		59.06	27.26	86.32	5.57	33.03	38.60	124.92
계				2,050.28			913.04	2,963.32

□  추진현황 및 향후계획

○  예산요청 근거 : 서울특별시 주택정책과-8990(2016.2.31)

서울특별시 도시 및 주거환경정비조례 제23조

○  사업수행주체 : ○○구역 주택재개발정비사업조합

○  사업추진경위

- 2008.12.14 : 주택재개발구역지정

- 2009.03.20 : 조합설립인가

- 2012.04.15 : 사업시행인가

- 2014.07.22 : 관리처분계획인가

- 2016.12.    : 착공예정

- 2018.04.    : 준공예정

○ 현 사업진행단계 : · 이주(97%) 및 철거(74%) 진행중

· 미 이주자 수용재결 및 명도소송 진행중.

□ 소요예산(특별회계)(단위 : 천원)

예산과목	2014 결산	2016					2017 요구 (B)	증 감 (B-A)	산출내역
		예산액 (A)	예산 현액	지출액	이월 예상액	집행 잔액
계		0					3,552,503	3,552,503
자산 및 물품취득비		0					3,552,503	3,552,503	• 계약금(20%) 10,150,009×20%=2,030,002 • 1차중도금(15%) 10,150,009×15%=1,522,501

□ 연차별 계획(중기재정계획)(단위 : 천원)

예산과목	총사업비	기투자	2016예산	2017	2018	2019	2020이후
계	10,150,009	-	-	3,552,503	4,567,504	2,030,002
자산 및 물품취득비	10,150,009			3,552,503	4,567,504	2,030,002

□ 세부 추진절차 및 예산집행계획(단위 : 천원)

세부추진절차	기 집행(년,월)	집행예정(년,월)	집행액	추 진 내 용
계	-	-	10,150,009
∘계약금	-	2017.08	2,030,002	※ 특이사항 표시
∘중도금 1차	-	2017.12	1,522,501
∘중도금 2차	-	2018.04	1,522,501
∘중도금 3차	-	2018.08	1,522,501
∘중도금 4차	-	2018.12	1,522,502
∘잔금1차(준공)	-	2019.04	1,522,501
∘잔금2차(이전고시)	-	2019.06	507,501

구 분	직 책	성 명	전화번호	직 책	성 명	전화번호
작성자	재개발팀장		123-1234	담당자		123-1235