자문 검토 의견서

○ 2018년 상반기 노원구 하수관로정비사업(동일로)

안 건	검 토 의 견
2018년 상반기 노원구 하수관로정비사업 (동일로)	〈공통사항〉 1. 구간별 공사개요 및 매설관경별 굴착단면도를 제시하기 바랍니다. 〈A-구간〉 2. 1, 2단계 하수관 매설에 따른 장비 진․출입과 보행동선이 겹치게 되어 보행 안전이 우려되므로 보행안전을 도모할 수 있도록 검토바랍니다. 〈B-구간〉 3. 2단계 버스bay구간의 단계를 나누어 버스bay구간을 우선 시공 완료함으로써 버스정류장 이전기간을 최소한으로 짧게 운영할 수 있도록 검토바랍니다. 〈C-구간〉 4. 1~4단계 동일로측 1차로부분까지 점용구간을 추가 확보하여 작업공간으로 사용할 수 있는지 검토하기 바랍니다. 5. 5단계 보행공간을 최소한으로 확보하고 동일로에서 우회전차로를 포함하여 작업공간을 추가로 확보하여 사용할 수 있도록 검토바랍니다. 6. 6단계 버스정류장을 중심으로 단계를 나누어 시공함으로써 버스정류장 이전 위치를 최소화하던지(버스운행시간 이후에 공사 하던지) 등 방안을 검토바랍니다. 7. 7단계 보도 및 횡단보도구간 일부를 추가 점용함으로써 점용면적을 추가로 확보하여 공사가 원활히 될 수 있도록 하고 보행안전을 위하여 안전원을 배치하기 바랍니다. 8. 용역계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 11