공사기성부분(9차6회) 건설사업관리조서

공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(9차)

2017년 11월 30일 서울특별시 도시기반시설본부와

㈜대우건설,경남기업㈜,남광토건㈜,현대엔지니어링㈜,(주)호반산업과 계약분

위 공사의 감리원으로 임명받아 2018년 08월 05일부터 2018년 09월 05일까지

실지 현장 감리한 결과 (제6회 기성부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서,품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 80.5%가 기성되었음을 인정함.

2018년   09월  11일

책임건설사업관리기술자    신 정 묵   (인)

주식회사 선진엔지니어링 종합건축사사무소 대표이사 귀하

금회 기성(준공)금 신청현황

□ 공사명(용역명)  :서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(9차)

□ 계약현황(9차공사 )                                           (단위 : 원)

총 액	전회까지 계약액	금회 계약액 (9차)	장 래 분	비 고
141,719,000,000	124,698,000,000	11,183,000,000	5,838,000,000	9차공사
	135,881,000,000	5,838,000,000	-	10차공사

□ 기성(준공) 현황(9차 6회)                                     (단위 : 원)

계 약 액 (A)	전회까지 기성액	금회 기성액 (C)	누 계	비 고
11,183,000,000	8,400,000,000	600,000,000	9,000,000,000

□ 선금급 정산현황                                              (단위 : 원)

계약액 (채무제외) (A)	선금 지급액 (B)	선금급 정산현황			비고
		전회까지 정산액	금회 정산액 (D)	누 계
-	-	-	-	-

※ 선금 정산액(D)	=	선금지급액(B)	×	금회 기성액(C)
				계 약 액(A)

※ 선금 정산은 백만원 미만은 절상하여 백만원 단위로 정산함을 원칙으로 한다.

□ 기성(준공)금 신청현황(9차 6회)                               (단위 : 원)

계 약 액	기성(준공)액	선금 정산액	실 지급액	비 고
11,183,000,000	600,000,000	-	600,000,000

□ 각사별 기성(준공)금 신청현황(9차 6회)	(단위 : 원)

실 지급액	대우 (40%)	경남 (20%)	현엔 (15%)	남광 (15%)	호반 (10%)	비고
200,241,740	80,096,700	40,048,350	30,036,260	30,036,260	20,024,170

실 지급액	㈜동아 지질	우선 이엔씨㈜	㈜세화내장 건설(금속)	㈜한성 기술개발	자재비	비고
399,758,260	165,000,000	6,050,000	89,870,000	19,030,000	119,808,260

작성자 : 현장대리인    배 병 두 (인)

확인자 : 책임건설사업관리기술자  신  정  묵  (인)