서울특별시 상수도사업본부

암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사

계단(목재데크)설치

실정보고 검토의견서

	목 차
Ⅰ. 공사현황 Ⅱ. 검토개요 Ⅲ. 실정보고내용 Ⅳ. 건설사업관리단 검토내용

2020. 04.

건설사업관리단

검 토 의 견 서

Ⅰ. 공사현황

1. 공 사 명 : 암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사

2. 공사개요 :

가. 1정수장 배출수지 증설   : B7.75×L32.4×H4.0×1지(증 1,004㎥)

나. 1정수장 배슬러지지 증설 : B7.8×L24.0×H4.0×1지(증 748㎥)

다. 2정수장 배슬러지지 증설 : B5.0×L16.5×H3.5×2지(증 578㎥)

3. 도 급 비 : 3,117 백만원

4. 공사기간 : 2018. 07. 25 ~ 2020. 04. 20

5. 시 공 사 : ㈜신미화건설 외 1개사

6. 감 리 사 : ㈜화신엔지니어링 외 1개사

Ⅱ. 검토개요

- 『암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량공사』 중 암사정수센터의 요청사항인 1,2정수장 배슬러지지의 유지관리 근무자의 안전한 통행을 위한 계단 설치와 관련하여 이에 대한 적정성을 검토하고자 함.

Ⅲ. 실정보고 내용

1. 시공사 실정보고 사유

가. 1정수장 배슬러지지, 2정수장 배슬러지지의 접근성을 높이기 위해 목재계단 설치

나. 관련공문

- 신미화건설 CON-2020-03-01호_실정보고()

2. 도면 및 현황사진

1) 도면

- 평면도

- 단면도

2) 현황사진

- 1정수장 배슬러지지

- 2정수장 배슬러지지

3. 공사물량 및 개략공사비 산정(계약단가 적용)

(단위 : 원)

구 분	단 위	금액			비고
		당 초	변 경	증·감
직접 공사비	식	-	9,291,000	9,291,000
제경비	식	-	4,258,000	4,258,000
도급 공사비 계			13,549,000	13,549,000

Ⅳ. 건설사업관리단 검토내용

1. 현황 및 검토내용

1) 현황

- 제1정수장 배슬러지지 및 제2정수장 배슬러지지의 유지관리를 위한 안전한 접근성확보를 위해 계단 설치를 ‘암사정수센터’에서 요청

2) 검토내용

- 시설물의 원활한 운영 및 유지보수와 안전성을 높이고 특히 겨울철 결빙 및 빙설을 고려하여 콘크리트, 철재 계단보다 안전한 목재테크 계단시공이 필요한 것으로 판단 됨

2. 공사비 검토

1) 공사비 검토 결과 목재테크 계단설치 시 비용은 고가이나 유지관리 담당자들의 안전을 고려하여 정수센터에서 요청한 2개소 공사비의 산정은 적정한 것으로 검토

구분		#1 배슬러지지	#2 배슬러지지	계
1안	형식	계단1.6m X 6m	계단1.6m X 8m
	공사비	5,524,000	8,026,000	13,550,000
2안	형식	계단 1.6m X 6m	안전난간 7m*2
	공사비	5,524,000	1,741,000	7,265,000
차 액			6,285,000	6,285,000

※ #1배슬러지지 콘크리트 계단설치 예상공사비 2,950,000원.

- 공사비 합계

(단위 : 원)

구 분	단 위	금액			비고
		당 초	변 경	증·감
목재데크계단설치	식	-	9,291,000	9,291,000
직접 공사비 계		-	9,291,000	9,291,000
제경비	식	-	4,259,000	4,259,000
도급 공사비 계			13,550,000	13,550,000

- 1정수장 배슬러지지 계단

(단위 : 원)

구 분	단 위	금액			비고
		당 초	변 경	증·감
목재데크계단설치	식	-	3,782,000	3,782,000
직접 공사비 계		-	3,782,000	3,782,000
제경비	식	-	1,742,000	1,742,000
도급 공사비 계			5,524,000	5,524,000

-  2정수장 배슬러지지 계단

(단위 : 원)

구 분	단 위	금액			비고
		당 초	변 경	증·감
목재데크계단설치	식	-	5,509,000	5,509,000
직접 공사비 계		-	5,509,000	5,509,000
제경비	식	-	2,517,000	2,517,000
도급 공사비 계			8,026,000	8,026,000

3. 관련법령 검토

1) 설계변경

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항. 설계변경  가. 설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 한다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 ‧오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우

2) 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우

2) 계약금액의 조정

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정1항. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

나. 발주기관이 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함한다. 이하 같다)에는 “가”에도 불구하고 증가된 물량이나 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 발주기관과 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 “협의”라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

※ 협의률 92.84% = (100+85.68)*50/100

4. 검토결과

1) 상기 검토내용과 시설물의 원활한 운영 및 유지보수와 안전성을 높이고 특히 겨울철 결빙 및 빙설을 고려하여 콘크리트, 철재 계단보다 안전한 목재테크 계단시공이 타당한 것으로 판단 됨.

2) 본 실정보고의 승인 후 계약금액조정심의 소위원회 검토결과에 따라 공사비를 확정하고 설계변경에 반영코자 합니다.

검토자 : 책임건설사업관리자  김 현 영  (인)