1		동대문디자인플라자 운영준비

(문화관광디자인본부, 디자인정책과)

DDP가 동대문상권 활성화에 기여하면서 디자인을 포함한 문화예술, 창의산업의 중심으로 자리 잡을 수 있도록 콘텐츠 및 프로그램을 기획･구축하여 2014. 3월 개관과 동시에 정상가동될 수 있도록 준비함

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 건립개요

･ 위치 : 중구 을지로 옛 동대문운동장 부지 (65,232㎡)

･ 규모  :  총면적 85,320㎡ (지상4층/지하3층)

- 공간현황 : 5개 시설 15개 공간

A B C D E	A	아 트 홀 : 창조･문화산업 런칭패드, 트렌드 선도공간 - 오픈스튜디오, 연회장, 회의실 등
	B	뮤 지 엄 : 디자인･산업발전 100년 대서사, 창조문화 소통공간 - 기획전시관, 디자인박물관, 둘레길, 상상체험관 등
	C	비즈센터 : 지식정보센터 및 라이프스타일 교육공간 - 트렌드라이브러리, 비즈스트리트, 아카데미홀 등
	D	공 원 : 도심 속 열린 공원, 친환경 디자인 공원 - 쾌적한 쉼터 및 만남의 공간
	E	편의시설 : 동대문 언더그라운드 네트워크 거점 - 커뮤니티 참여공간, 평화광장

❍ 사업기간 : ’06. 9월 ~ ’14. 2월 (현 공정률 93%)

❍ 총사업비 : 69,884백만원

- ’11년 이전 : 29,130백만원,  ’12년 : 430백만원,  ’13년 이후 : 40,324백만원

※ DDP 건립 및 운영준비 예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	2006~2009	2010	2011	2012	2013	2014
계	492,446	141,899	75,789	92,006	72,630	98,959	11,163
건 립	422,562	134,134	72,367	74,063	72,200	69,798	-
운영준비	69,884	7,765	3,422	17,943	430	29,161	11,163

❍ 기대효과

-  디자인･패션･문화예술 등 창조산업 역량 강화 및 시민의 문화 향수 기회 증대

-  패션･봉제산업 경쟁력 강화 및 동대문지역 상권 활성화

-  서울의 대표적 랜드마크로서 서울･동대문의 브랜드 마케팅에 기여

2		추 진 결 과

❍ ’11. 12 ~ ’12. 10  DDP 콘텐츠 보완

- 의견수렴

･ 전문가 자문회의(1월) 및 각계 전문가 개별면담 및 심층의견수렴(1~6월)

･ DDP 청책워크숍 개최(4. 24), DDP 전문가 창의공정(6~7월)

･ 온라인･SNS･DDP 현장토론 등 다양한 채널 통한 의견 수렴

- 연구용역

･ DDP 콘텐츠 검토 및 보완 연구 : 한국예술종합대학 컨소시엄(7~10월)

･ 동대문권역 활성화 종합대책 연구 : 서울연구원(4~9월)

- 보완내용

･ 목표･비전 : ‘새로운 생각’의 전파, ‘다양한 인재’ 육성, ‘더 나은 생활’ 위한 일터를 제공하는 “21세기 디자인 창조･지식의 발신지”

･ 추진전략 : ‘24시간 활성화’, ‘스토리 담은 60개 장소 명소화’, ΄100% 운영 효율화’

❍ ’12. 11. 26        DDP 운영계획 시의회 보고

❍ ’12. 12. 11        DDP 운영계획 기자설명회 개최

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	3,422	-	-	3,422	3,422	-	-	100%
2011	19,124	-	-	19,124	17,943	-	1,181	93.8%
2012	430	-	-	430	430	-	-	100%

❍ ’12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
430	430	100%

3		당면과제

❍ 동대문상권과 DDP의 동반 활성화에 기여하기 위한 주변환경 개선

- 교통, 보행환경, 관광 등 DDP 및 동대문지역 활성화 종합대책 추진

- 업종별･상권별 유관단체･조합 등과 협력체제 구축

❍ 지속가능한 재정자립기반 구축

- 대관 활성화, 편의시설 임대 등 다양한 수익모델 개발

- 공간 활용도･가동률 제고 위한 기간설비 보완

❍ DDP 개관 직후 정상 가동 가능하도록 사업 완성도 제고

- ‘공개･공정･공유’를 기반으로 한 투명한 사업발주 및 관리

-  능력있는 기업의 선발･참여 및 사업간 유기적 협력체제 구축을 통해 DDP 비전 구현에 필요한 사업 완성도 확보

4		향 후 계 획

❍ ’13. 5월 ~	DDP 디자인구축사업(공간･정보시스템･프로그램 구축)

참여기업 선정 및 사업 착수

❍ ’13. 7월	DDP 건물 완공

❍ ’13. 12월	편의시설 오픈, DDP 공간･정보시스템･프로그램 구축 완료

❍ ’14. 1월	DDP 시설 시험가동 및 운영시스템 점검

❍ ’14. 3월	DDP 개관