문서번호	공원사업과-2286
결재일자	2018.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원사업과장	공원부장

2018 이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계용역 준공기한 연기계획

2018. 11.

공   원   부

(공원사업과)

「2018 이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계용역」

준공기한 연기계획

「2018 이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계용역」 추진과 관련하여 아래와 같이 준공기한을 연기하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018 이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계용역

○ 위    치 : 이촌한강공원 내

○ 공사내용 : 제방형 트랙 200m

○ 공사기간 : 2018.10.29. ~ 2018.11.27

○ 총공사비 : 금15,700,000원

○ 도급업체 : ㈜스포츠그룹지인 대표 정구석

□ 공사기간 변경내용

○ 공사기간 변경(준공기한 연장)

당 초	변 경	비 고
2018. 10.29. ~ 11.27.	2018. 10.29. ~ 12.7.	10일간 공기연장

○ 연기사유

- 2019년 전국체전을 위하여 새롭게 조성되는 롤러경기장 새로운 규격이 뱅크형 트랙에서 Parabolic Track으로 변경됨에 따라 자문 및 협의를 위한 절대 공기 부족

○ 연기사유 귀책소재 : 발주처

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.