등록번호	도로시설과-13573		주무관		도로굴착팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2019.12.3.
결재일자	2019.12.3.
공개구분	비공개(5 6)
			협조
「2019년 도로굴착복구공사(연간단가)」 설계변경(정산) 검토 보고
생활도시친화국 [도 로 시 설 과]

「2019년 도로굴착복구공사(연간단가)」

설계변경(정산) 검토 보고

「2019년 도로굴착복구공사(연간단가)」의 시공물량 변경(증·감)에 따른 설계변경 요인이 발생하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2019년 도로굴착복구공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2019.02.25. ~ 2019.12.31.

□ 도 급 액 : 금629,020천원 (도로굴착복구기금)

□ 도 급 자 : 돈지종합건설㈜ 대표 곽동철

□ 공사개요 : 아스팔트포장 100a, 보도포장 6a, 콘크리트포장 50a

Ⅱ		보 고 내 용

□ 설계변경 사유 : 관리청 복구물량 변동에 따른 시공물량 증․감

□ 주요공종 변경 현황

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증‧감		비고
소형고압블록포장	T=6~8cm	a	3	1	(감)	2
화강판석포장	야간	㎡	1	288.1	(증)	287.1
아스팔트 표층	T=5cm, 인력	a	50	70.8	(증)	20.8
아스팔트 표층(야간)	T=5cm, 인력	a	50	70.1	(증)	20.1

□ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감		사유
총공사비	1,102,411,000	1,282,747,180	증	180,336,180	시공물량 증․감
도급비	629,020,000	851,367,000	증	222,347,000
관급비	328,301,350	295,365,180	감	-32,936,170
이전비	145,089,650	136,015,000	감	-9,074,650

□ 추가예산 확보 현황

구분	항 목	예산액(원)	비 고
	계	217,589,000
1	2019년 도로굴착복구기금 변경 (시설비)	120,000,000	도로시설과-10478(19.9.20.)
2	공사비 낙찰차액	97,589,000	도로시설과-12753(19.11.15.)

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 보고와 같이 시공물량 증․감 발생분을 반영하여 설계 변경(정산)을 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부. 끝.