천호대로(광나루역)확장공사

예산서 P.

1		기본현황

❏ 사업개요

기준년도	2019년
회계구분	교통사업특별회계 도시개발특별회계		□ 신규 ☑ 계속
			□ 경상 ☑ 투자
사업요약	도로확장 폭 6→10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)
사업기간	□ 연례반복	□ 사업기간 (2007년 03월 ~ 2019년 06월)
사업위치	서울특별시 광진구 광장동(아차산역~광나루역)
총사업비	총 110,500,600천원 / [국비] ( 5,844,786천원 ) [시비] ( 104,655,814천원 ) / [구비] ( ) [기타] ( )
사업비 (당해년도)	4,500,000천원 / [국비] ( ) [시비] ( 4,500,000천원 ) / [구비] ( ) [기타] ( )

❏ 사전절차 대상 및 이행여부

투자 심사	학술 용역	기술 용역	지방 보조금	정보화 예타	공유 재산	출자 출연	민간 위탁
☑	□	□	□	□	□	□	□

심의일자	심의결과	비 고
2009년 04월 24일	적정

□ 민간보조      □ 자치단체보조

지원형태	근 거	분담금액(비율)			심의결과
		국비	시비	구비
사업비보조
운영비보조

❏ 사업 담당자

실.국	부서	과장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	안대희	박영서 (2133-8086)	윤갑진 (2133-8088)

2		예산(안)설명

❏ 예산(안)총괄  (e-호조 연동)

(단위: 천원)

구분	2017년 예산액	2018 예산액	2019 예산(안)	증감 (B-A)
					(B-A)*100/A
계	(x-) 19,272,000	(x-) 12,140,000	(x-) 4,500,000	(x-) -7,640,000	(x-) -63
시설비	(x-) 18,155,750	(x-) 11,942,370	(x-) 4,043,000	(x-) -7,899,370	(x-) -66
감리비	(x-) 1,108,000	(x-) 147,630	(x-) 457,000	(x-) 309,370	(x-) 210
시설부대비	(x-) 8,250	(x-) 50,000	(x-) -	(x-) -50,000	(x-) -100

❏ 예산(안)요구내역 및 산출근거

과목구분	2018년 예산액	2019년 예산(안)	증감사유
계	12,140,000,000원	4,500,000,000원	구의야구공원 주차장 부지조성 및 시설물 인수인계 관련기관 요구사항 (상징조형물 무인관리 시스템 외)
시설비	11,942,370,000원	4,043,000,000원
감리비	147,630,000원	457,000,000원
시설부대비	50,000,000원	- 원

과목구분	2018년 예산액
계	12,140,000천원
시설비	[토지보상비] ‧ 광장동 401-14[임야, 4,690㎡(조석래)] : 3,742,370천원 [경관개선공사] ∴ 5,200,000천원 ‧ 조경공사 : 수목식재 외 58,169주×43천원=2,527,105천원 ‧ 토목공사 : 산벽옹벽 외 247㎡×739천원=182,550천원 ‧ 수경설비공사 : 바닥분수,도섭지 외 1식×414,327천원=414,327천원 ‧ 전기공사 : 상부가로등 외 1식×104,856천원=104,856천원 ‧ 제경비 : 1,109,392천원 ‧ 관급자재 : 861,770천원 [상징조형물] ∴ 3,000,000천원 ‧ 기초공사 : 콘크리트타설 외 450㎥×258천원=116,150천원 ‧ 철골공사 : 철골제작 및 설치 외 120ton×2,425천원=291,000천원 ‧ 판넬 및 창호공사 : 외장판넬 외 1,500㎡×334천원=501,000천원 ‧ 내부마감공사 : 내부인테리어 외 1식×238,000천원=238,000천원 ‧ 승강설비공사 : E/V(20인승)외 2대×80,000천원=160,000천원 ‧ 전기소방공사 : 내부전기공사 외 1식×300,000천원=300,000천원 ‧ 설비공사 : 위생설비 외 1식×100,000천원=100,000천원 ‧ 제경비 : 597,152천원 ‧ 관급자재 : 33,750천원 ‧ 공공미술 및 설계 : 662,948천원	=	11,942,370천원
감리비	‧ 감리비 : 147,630천원	=	147,630천원
시설부대비	‧ 시설부대비 : 50,000천원	=	50,000천원

과목구분	2019년 예산(안)
계	4,500,000천원
시설비	[시설물 인·허가 기관 요구사항] ∴ 410,000천원 ○ 구의야구공원 주차장 부지조성(현장사무실 원상복구) ∴ 350,000천원 ‧ 토공사 : 기존구조물깨기 외 432㎥× 26천원=11,376천원 ‧ 포장공사 : 아스콘포장 외 90㎡×464천원=41,748천원 ‧ 우배수공사 : 원심력수로관 외 157m×79천원=12,376천원 ‧ 구조물공사 : 보강토옹벽 외 154㎡×591천원=90,989천원 ‧ 부대공사 : 디자인휀스 외 58경간×639천원=37,046천원 ‧ 제경비 : 66,930천원 ‧ 관급자재 : 89,535천원 ○ 구의야구공원 배수로 설치 ∴ 60,000천원 ‧ 우배수공사 : U형플륨관 외 300m×200천원=60,000천원 [시설물 인수인계 관련기관 요구사항] ∴ 1,110,000천원 ○ 지하차도 상부공원 유지관리 ∴ 1,080,000천원 ‧ 경관개선공사 : 그늘막 2EA×30,000천원=60,000천원 ‧ 경관개선공사 : 공중화장실 2EA×160,000천원=320,000천원 ‧ 경관개선공사 : 운동기구 16대×2,875천원=46,000천원 ‧ 경관개선공사 : 관리사무실 1개소×34,000천원=34,000천원 ‧ 경관개선공사 : 야외무대 1개소×200,000천원=200,000천원 ‧ 경관개선공사 : 식재유지관리비 1식x80,000천원=80,000천원 ‧ 상징조형물(전기) : 무인관리시스템외 1식× 300,000천원=300,000천원 ‧ 기타 : 상수도인입 외 1식x40,000천원=40,000천원 ○ 중앙버스전용차로 표지판 추가설치 ∴ 30,000천원 ‧ 교통안전시설공사 : 교통안전표지 외 1식×30,000천원=30,000천원 [공기연장에 따른 추가비용] ∴ 2,523,000천원 ‧ 제요율제외적용공종 : 2,523,000천원	=	4,043,000천원
감리비	‧ 감 리 비 : 457,000 천원	=	457,000 천원
시설부대비	‧ 시설부대비 : - 천원	=	- 천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	시설물 인·허가 기관 및 시설물인수인계 관련기관 요구사항

❏ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위: 백만원)

구 분		계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계		(x5,845) 110,500	(x5,845) 93,860	(x-) 12,140	(x-) 4,500	-
	시설비	(x5,845) 105,327	(x5,845) 89,342	(x-) 11,942	(x-) 4,043	-
	감리비	(x-) 5,057	(x-) 4,452	(x-) 148	(x-) 457	-
	시설부대비	(x-) 116	(x-) 66	(x-) 50	(x-) -	-

3		사업설명

❏ 사업목적

○ 천호~하남 광역BRT사업과 연계된 중앙버스전용차로 설치를 위한 천호대로 병목구간 확장 및 천호대로로 단절된

아차산 녹지축 연결

❏ 사업근거

○ 법령상 근거

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

○ 기타근거 (방침, 지침 등)

- ‘63년 도시계획시설(도로)결정(건고시 제783호)되어 일부 미집행된 천호대로 일부를 확장하여 강북 교통편익 증진

❏ 추진경위

○ ‘08. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수(도로계획담당관)

○ ‘09. 04. : 중앙투 ․ 융자심사(적정-국비 25%확보)

○ ‘09. 10. : 건설기술심의(조건부 채택-실시설계시 심의)

○ ‘10. 05. : 실시설계용역완료

○ ‘10. 06. : 도시계획시설(도로)변경 결정

○ ‘10. 10. : 공사착공

○ ‘11. 03. : 도로점용공사장 교통소통대책자문협의, 경찰청 규제심의 협의

○ ‘11. 12. : 토공사 및 가설교량 설치

○ ‘12. 03. : 교통전환 1단계 부분전환 및 가설교량 개통(기존고가교 철거)

○ ‘13. 05. : 상수도 A-LINE 이설완료

○ ‘13. 07. : BOX형 옹벽 구조물 착공(좌측)

○ ‘14. 09. : 지방재정 투․융자심사(총업비 983억원 변경 적정)

○ ‘15. 05. : 공사 2단계(좌측) 지하차도 구조물 완료

○ ‘15. 12. : 공사 3단계 교통전환 완료 및 토공작업(중앙부) 실시

○ ‘16. 06. : 공사 4단계 교통전환 완료 및 지하차도 우측 구조물 시공

○ ‘16. 06. : 공사 4단계 교통전환 완료 및 지하차도 우측 구조물 시공

○ ‘17. 02. : 지하차도 중앙벽체 구조물 시공 완료

○ ‘17. 09. : 지하차도 파형강판 설치 및 상부 보강 라이닝 완료

○ ‘17. 10. : 중앙버스전용차로 및 경관개선공사 착수

○ ‘18. 05. : 중앙버스전용차로 개통

○ ‘18. 06. : 지하차도 상부 경관개선공사 완료

❏ 사업내용

○  위    치 : 광진구 구의동 58-15∼광장동 388-10 (아차산역∼광나루역)

○  규    모 : 도로확장 : 6차로→10차로, 연장 : 900m

○  사업기간 : 2007. 3. ~ 2019. 6.

○  사업내용 : 지하차도(L=580m), 버스중앙차로 설치, 상부도로 등

○  총사업비 : 110,500백만원(국비 5,845백만원, 시비 104,655백만원)

- 설계비 1,535  시설비 88,645 감리비 5,057 시설부대비 116  보상비 15,147

❏ 사업계획(투자사업의 경우)

○  위    치 : 광진구 구의동 58-15∼광장동 388-10 (아차산역∼광나루역)

○  규    모 : 도로확장 : 6차로→10차로, 연장 : 900m

○  사업내용 : 토공사, 배수공사, 조경공사, 포장공사, 부대공사 등 시행

○  소요예산(안) : 4,500백만원(시설비 4,043, 감리비 457, 시설부대비 -)

❏ 추진일정

(단위: 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	세부추진내용
		4,500,000
토지매입비	-	-
시설물인수인계	19년01월 ~ 19년06월	4,043,000	구의야구공원 주차장 부지조성 및 시설물 인수인계
감리비	19년01월 ~ 19년07월	457,000
시설부대비	-	-

4		사업효과

❏ 최근 3년간 추진실적

□ 달성목표 :

구 분	16년	17년	18년
계획	❍❍회	❍❍회	❍❍회
달성	❍❍회	❍❍회	❍❍회

2016년	‧ 지하차도 구조물 우측 시공완료 및 6단계 교통전환 완료 ‧ 주민설명회 개최(상부경관개선공사)
2017년	‧ 지하차도 파형강판 설치 및 라이닝보강 완료 ‧ 우측 보행자통로 및 지하차도 전면개통
2018년	‧ 중앙버스전용차로 개통 ‧ 지하차도 상부 경관개선공사 완료(상징조형물 포함)

❏ 향후 기대효과

○ 주변 등록문화재 및 간이야구장 등 연계와 녹지축 연결로 시민고객에게 통행편의 제공 및 장기미집행 시설에

대한 민원 해소

○ 불합리한 종단경사를 개선하고 보행자와 자전거이용자의 통행구간을 분리함으로써, 이동편의 증진 및 소음․매연

저감, 사람과 차량이 함께 안전하게 이용하는 친환경 도로 조성

○ 천호대로 확장에 따른 중앙버스전용차로 도입으로 서민 대중교통 이용편의 제공

※ 사업구간 평균통행속도 : 28.00 → 33.25㎞/hr 증가

5		최근3년 결산현황

(단위: 천원)

연도	최종예산 (A)	전년이월 (B)	예산변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시․사고)	집행잔액
2015	(x-) 13,000,000	(x-) 197,000		(x-) 13,197,000	(x-) 12,298,878	(x-) 891,000
2016	(x-) 16,050,000	(x-) 891,000		(x-) 16,941,000	(x-) 6,453,239	(x-) 6,469,990
2017	(x-) 19,272,000	(x-) 6,469,989		(x-) 25,741,989	(x-) 16,495,973	(x-) 8,986,514

6		참고자료

□ 기본계획서  □ 사전협의결과서   □ 추진결과보고서   □ 위치도    □ 성인지    □ 기타

▢ 위치도 및 조감도

위  치  도

조 감 도