10분 동네 생활SOC 시범사업 공정 관리카드(자치구)

□ 사업개요

사업명
사업위치
공급 시설	유형
	세부 시설
	규모	○층수, 연며적 : 지하 / 지상 연면적 ㎡ ○층별용도 : ○토지면적 : ㎡ ○구 조 : 조
사업예산		총사업비 (A+B+C)		국비 (A)		지방비(B)			기타(C)
						시·도비	시군구비
		백만원				백만원	백만원		백만원
		※ 부지매입비 백만원, 설계비 백만원, 공사비 백만원, 감리비 백만원, 기타 부대비 백만원
담 당 자 (직급/직책)		담당부서	성명		사무실 전화번호			핸드폰 번호
		0000	000		000-0000			000-0000-00000
위치도					사진(조감도,현장사진)

□ 추진 실적 및 추진 계획[사업현황에 맞게 작성]

년 월	추진실적	추진계획
’21.01.	신축공사 실시설계 용역 준공
’21.02.	신축공사 발주
’21.03.		감리용역 발주
’21.04.
’21.05.
’21.06.
’21.07.
’21.08.
’21.09.
’21.10.		신축공사 준공
’21.11.
’21.12.

□ 현안사항

○ 사업추진이 지연되는 사유 구체적으로 작성

- 민원, 예산 등 애로사항 및 장애요인 등

첨부		10분 동네 생활SOC확충 시범사업(’19년) 현황

(단위: 백만원,㎡)

연번	자치구	사 업 명	SOC 공급시설		규모	사업비	사업 기간	현공정 (21.3.)
			유형	세부시설
1	관악구	관악구가족문화 복지센터	돌봄	영유아돌봄 체험놀이공간	지하2층/지상6층 연면적 3,999.8㎡	23,664	’19.08. ~’21.05.	공사 (5)	마감공사
2	영등포구	밤동산마을도서관	학습	도서관, 프로그램실 커뮤니티 공간	지하1층/지상3층 연면적 302.81㎡	2,165	’19.07. ~’21.07.		구조보강 공사
3	광진구	자양동청소년독서실	학습 휴식	청소년열람실 커뮤니티룸	지상4층 연면적 276.48㎡	2,707	’19.08. ~’22.1.		자재반입
4	강북구	다목적 소극장	휴 식	소공연장	지상3층 연면적 1,574㎡	6,562	’19.04. ~’22.06.		자재준비
5	용산구	용산2가동 공영주차장 입체화사업	교통	기계식주차장(54면) 주민공동이용시설	연면적 1,300㎡ (주차장 1,000㎡)	3,800	’19.08. ~’21.12.		지하 터파기
6	종로구	어린이놀이교육 센터 설치	학습	어린이놀이 교육센터	지상2층(증축 270㎡) 리모델링 200㎡	2,179	’20.01. ~’21.09.	공사발주 준비(2)
7	강서구	평면식 주차장	교통	소규모 주차장(9면)	부지 253.8㎡	2,000	’19.08. ~’21.05.
8	양천구	녹지주차장 & 작은도서관 복합화	교통 돌봄	주차장(15면) 키움센터	지하1층/지상1층 연면적 645㎡	1,999	’19.09. ~’21.12.	설계 (6)
9	구로구	텃골주민공유 복합시설	복 합	공유주방 주민소통공간	지하1층/지상2층 연면적 240.93㎡	1,997	’19.07. ~’21.08.
10	은평구	수리마을 생활기반복합시설	돌봄	공동육아실, 열람실 장난감대여실	지하1층/지상3층 연면적 420㎡	2,531	’19.08. ~’21.12.
11	성북구	청소년문화예술시설	학습	청소년음악교실 청소년영상제작실습실	지상4층 연면적 334㎡	1,920	’20.01. ~’21.12.
12	중랑구	묵2동작은도서관	학습	도서관	지하1층/지상2층 연면적 180㎡	2,000	’19.08. ~’21.12.
13	강동구	명일1동 주민센터	복합	어린이집 가족센터	지하4층/지상13층 연면적 13,459㎡	40,340	’19.04. ~’23.12.