10분 동네 생활SOC 시범사업 공정 관리카드(자치구)

□ 사업개요

사업명
사업위치
공급 시설	유형
	세부 시설
	규모	○층수, 연며적 : 지하 / 지상 연면적 ㎡ ○층별용도 : ○토지면적 : ㎡ ○구 조 : 조
사업예산		총사업비 (A+B+C)		국비 (A)		지방비(B)			기타(C)
						시·도비	시군구비
		백만원				백만원	백만원		백만원
		※ 부지매입비 백만원, 설계비 백만원, 공사비 백만원, 감리비 백만원, 기타 부대비 백만원
담 당 자 (직급/직책)		담당부서	성명		사무실 전화번호			핸드폰 번호
		0000	000		000-0000			000-0000-00000
위치도					사진(조감도,현장사진)

□ 추진 실적 및 추진 계획[사업현황에 맞게 작성]

년 월	추진실적	추진계획
’21.01.	신축공사 실시설계 용역 준공
’21.02.	신축공사 발주
’21.03.		감리용역 발주
’21.04.
’21.05.
’21.06.
’21.07.
’21.08.
’21.09.
’21.10.		신축공사 준공
’21.11.
’21.12.

□ 현안사항

○ 사업추진이 지연되는 사유 구체적으로 작성

- 민원, 예산 등 애로사항 및 장애요인 등

첨부		10분 동네 생활SOC확충 시범사업(’19년) 현황

(단위: 백만원,㎡)

연번	자치구	사 업 명	SOC 공급시설		규모	사업비	사업 기간	현공정 (21.5.)
			용도 구분	세부시설
1	관악구 남부순환로149길8-4	관악구가족문화 복지센터	보육	영유아돌봄 체험놀이공간 장난감관‧도서관	지하2층/지상6층 연면적 3,999.8㎡	23,664 (시비2,000)	’19.08. ~’21.05.	공사 (7)	마감공사
2	영등포구 신길동 1-10	밤동산마을도서관	도서관	도서관, 프로그램실, 커뮤니티 공간, 북카페 등	지하1층/지상3층 연면적 303㎡	2,600 (시비2,000)	’19.07. ~’21.12..		구조보강 공사
3	광진구 자양동46-12	자양동청소년독서실	청소년 아동	청소년열람실 커뮤니티룸	지상4층 연면적 276㎡	2,707 (시비2,000)	’19.08. ~’22.1.		골조공사
4	강북구 삼각산로 85	다목적 소극장	문화	소극장	지상3층 연면적 1,790㎡	6,562 (시비2,000)	’19.04. ~’22.06.		철거공사
5	종로구 성균관로91. (올림픽기념국민생활관)	어린이놀이교육 센터 설치	보육	어린이놀이 교육센터	지상2층(증축 244㎡) 리모델링 213㎡	2,820 (시2,630)	’20.01. ~’21.10.		자재준비
6	구로구 오류동6-327	텃골주민공유 복합시설	문화	북카페,공유주방 주민소통공간	지하1층/지상2층 연면적 241㎡	1,997 (시비)	’19.07. ~’21.08.		자재준비
7	용산구 용산동2가동47-2	용산2가동 공영주차장 입체화사업	주차장	기계식주차장(54면) 주민공동이용시설	지하1층/지상5층 연면적 1,300㎡ (주차장 1,000㎡)	3,800 (시비2,000)	’19.08. ~’21.12.		1층바닥완료
8	성북구 석관동 250-12	청소년문화예술시설	청소년 아동	청소년음악교실 영상제작실습실 카폐, 놀이공단, 자유쉼터	지상4층 연면적 334㎡	2,000 (시비)	’20.01. ~’21.12.	공사발주 준비(3)
9	중랑구 묵동 240-75	묵2동작은도서관	도서관	도서관	지상3층 연면적 198㎡	2,000 (시비)	’19.08. ~’21.12.
10	강서구 화곡동366-47	평면식 주차장	주차장	소규모 주차장(9면)	부지 254㎡	2,000 (시비)	’19.08. ~’21.05.
11	양천구 목동775-25외7	녹지주차장 & 작은도서관 복합화	주차장	주차장(15면) 작은도시관	지하1층/지상2층 연면적 726㎡	1,999 (시비)	’19.09. ~’21.12.	설계 (3)
12	은평구 불광동 16-269	수리마을 생활기반복합시설	보육	주민공동시설, 키움센터, 열린육아방, 작은도시관	지하1층/지상3층 연면적 420㎡	2,531 (시비)	’19.08. ~’21.12.
13	강동구 명일동327-5,6	첨단복합청사 복합개발	보육	명일1동주민센터 어린이집, 작은도서관, 가족센터, 공영주차장, 수영장,행복주택 등	지하4층/지상16층 연면적 15,281㎡	40,340 (시비2,000)	’19.04. ~’23.12.