문서번호	정수시설과-10083
결재일자	2019.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
협 조
	행정관리과장
	정수과장

10월『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

2019. 10.

영등포아리수정수센터

정수시설과

10월『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

□ 회의 개요

○ 일시 : 2019. 10. 22(화) 14:00 ~ 15:00

○ 장소 : 센터 회의실

○ 참석자 : 센  터 : 정수시설과장외 직원 6명

시공사 : 시공감리단장 및 현장소장외 2명

○ 회의안건

1) 2019. 11월에 센터내 진행할 공정 설명

2) 공정 대한 센터 의견 제시

3) 그간 추진해온 공사에 대한 센터 간섭사항 의견 제시 등

□ 주요내용(요약)

【센터】

○ 시설물 보호를 위해 지하지장물에 대한 영향 검토가 필요함.

○ 공사로 인한 진동등이 허용치 이내이더라도 누적되면 구조물에 피해가 있을 수 있어 공사 추진에 각별이 유의하여주시기 바람.

○ 도수관로 공사 완료 후 측량자료 등 자료 이관 요청

○ 공사7구역 누수보수공사로 인해 레미콘 차량 출입이 불가할 수 있으니 공사일정에 참조하시기 바람.

○ 액화산소보호탱크 설치 후의 적정성 검토결과(가스안전공사) 제출 요청

【감리단】

○ 기 제공받은 시설배치도만으로는 중장비 위치 및 영향도 검토가 어려움. 실질적인 공동구 배치도 및 구조검토서 공유 요청드림

【시공사】

○ 공사 7구역의 경우 기존 사례를 통해 안정성에는 문제가 없다고 판단되며 금회 R.C.D공법은 진동을 최소화한 공법으로 정수센터에 피해가 가지 않도록 추진 예정임.

○ 공사 7구역 현장타설말뚝 타설 시에 한해(11월 중 3회 예정) 생물활성탄 접촉조 후면 사용 및 후문 측으로 펌프카 조정원 및 근로자 출입 허용 요청

○ 공사 7구역 컨터이너 전기사용요청(계량기 설치 및 담당자 협의 후 사용 예정)

○ 금주 중 공사 2구역 사면정리 추진 예정

□ 조치자 의견 및 향후계획

○ 11월 공정에 대한 준수 여부 확인.

○ 12월 공정에 대한 T.F팀 회의 개최 .

○ 공정회의 사항을 감리단 및 시공사에 공문발송. 끝