업무연락전

지시번호

SMIH-14-36848

연번(문서번호)

SMIH-14-36848

지시일자

작성일자

2014-10-02

지 시 자

김상용

처리기한

제    목

10월 휴일 및 연장작업계획 승인

내    용

1. 도화(서남)2014-330호(2014.09.30) 『2014년 10월 휴일 및 연장작업계획 승인 요청』 과 관련입니다.

2. 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(4차)와 관련 2014년 10월 휴일 및 연장작업계획을 승인하오니 안전ㆍ품질관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 휴일 및 연장작업시 감리 및 현장관리자는 안전관련 20대 중점항목 준수 및 무리한 작업진행으로 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

작업일	작업내용	휴일작업 사유	감리대가
10월 03일 (공)	1) 6-2, 4 PHC파일 항타 2) 5-2구간 벽체철근 조립 3) 비계 및 동바리 설치 4) 쉬트파일 천공 및 항타	예정공정으로 진행	대체휴무
10월 04일 (토)
10월 09일 (공)
10월 11일 (토)
10월 12일 (일)		9월 추석연휴 및 우천으로 인한 부분공정 지연과 구조물공사의 연속성을 위해 작업 실시	시공사
10월 18일 (토)
10월 25일 (토)
10월 26일 (일)
1일∼31일 (18:00~20:00)

붙임 : 10월 휴일 및 연장작업계획 승인 요청문서 1부. 끝.

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부