문서번호	자연생태과-1554
결재일자	2012.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	산림관리팀장	자연생태과장	공원녹지국장

2012 서울둘레길 조성 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2012. 2

2012. 1

공원녹지국

(자연생태과)

2012 서울둘레길 조성 추진계획

서울의 내.외사산을 연결하는 순환코스를 정비하여 서울의 역사.문화.   자연생태를 탐방할 수 있는 네트워크 구축 및 시민들에게 탐방 기회 제공

□ 추진근거

❍ 서울둘레길 조성계획 (시장방침 제247호) : ’09.5.25

❍ 서울둘레길 조성 추진계획 (국장방침)     : ’11.7.20

□ 사업개요

❍ 대상지 : 서울의 내.외사산 연결코스 178km

- 서울성곽길 (21km) : 북악산, 낙산, 남산, 인왕산

- 서울둘레길(157km) : 북한산, 수락산, 용마산, 대모산, 관악산, 봉산 등

❍ 내  용 : 숲길정비 43.7km, 그린웨이 조성 9.1km, 연결다리 설치 등

❍ 기  간 : 2009. 5. ～ 2014. 12

❍ 예  산 : 45,000백만원(기투자 2,500백만원)

□ 2012년 사업추진 개요

❍ 위  치 : 대모 우면산(수서역~사당역), 안양천(석수역~가양대교)

수락 불암산 구간(도봉산역~수락산역), 관악산구간 안내체계 보완

❍ 규  모 : 40km (대모 우면산18.1km, 안양천18.1km, 수락 불암산3.8km)

❍ 내  용 : 숲길정비, 안내체계 정비, 노후시설 정비 등

❍ 기  간 : 2012. 2 ～ 2012. 12

❍ 예  산 : 2,651백만원(국비 1,326 시비 1,325)

□  세부 추진내역(자치구별)

구 별	산 명	위 치	연 장 (㎞)	소요예 산 (천원)	비 고
계			40	2,651,000
노원구	수락산 불암산	도봉산역~수락산역 불암산	3.8	731,000
강남구	대모산 구룡산	수서역~구룡산	10.5	969,000
서초구	구룡산 우면산	구룡산~우면산~ 사당역	7.6	658,000
금천구	안양천	석수역~가양대교	18.1	170,020	숲길정비 설계 완료후 차후 시행
영등포구	안양천	신정교~양화대교	-	55,000	자체 정비
관악구	관악산	사당역~호압사	-	45,080	안내체계 보완 (2011 시범조성 구간)
금천구	관악산	호압사~석수역	-	22,900	안내체계 보완 (2011 시범조성 구간)

□ 추진 일정

□  2012. 2월 ~    : 사업계획 수립(시달), 설계용역 타당성심사(용역비,     안내체계 보완예산, 안양천 자체정비 예산 재배정)

※ 담당, 설계사 등 관계자 현장교육 : 북한산자락길, 서울둘레길(관악산 시범조성구간)

□  2012. 3월 ~  4월 : 용역시행(설계심의)

□  2012. 5월 ~ 10월 : 공사시행(계약심사)

□  2012.11월 ~ 12월 : 공사완료(개통식 행사)

□ 행정사항

□ 계획수립 및 예산 재배정 ➟ 서울시(자연생태과)

□ 설계시행 ➟ 자치구

※ 서울둘레길 조성 지침을 참고하여 설계 및 공사 시행

□ 설계심의 ➟ 서울시(자연생태과)

※ “생명의 숲” 관계자 등 외부전문가 참여하에 기술자문 및 설계심의 병행

□ 계약심사 ➟ 서울시(계약심사과)

□ 공사발주 및 시행 ➟ 자치구

□ 공사착공 및 준공보고 ➟ 자치구

붙임 : 1. 2012년 서울둘레길 조성사업 대상지 1부.

2. 서울둘레길 조성 시행지침 1부.  끝.