문서번호	누수방지과-6016
결재일자	2014.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조
	★경영혁신과장

2014년 상반기

유수율 향상 추진실적 평가결과 및 시상계획

2014. 10.

상수도사업본부

[시설안전부]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'14년 상반기  유수율 향상 추진실적 평가결과 및 시상계획

’14년 상반기 수도사업소에서 유수율 향상을 위해 추진한 단위사업 평가를 실시하고 우수기관 및 유공 공무원에 대하여 시상하고자 함.

Ⅰ	평가개요

평가대상 : 수도사업소

○ 평가분야 : ’14년도 상반기 추진실적 ( ’14. 1. 1. ~ 6. 30.)

평가기준

○ 평가분야별 목표대비 실적에 따라 평점 부여

○ 평점을 높게 부여받은 사업소 순위에 따라 우수사업소 선정

평가항목 및 배점 : 13개 항목, 100점

○ 항목별 평가 배점

평 가 항 목	계	유수율증 대	누수탐지	기존관철 거	불용관정 비	노후인입급수관 정 비	유수장애정비	재개발 재건축 지역관리	유량계관 리	가압급수관리	조례 위반	중블록유수율	유수율분 석	유수율 유 공 실 적
배 점	100점	57	7	3	4	3	2	3	5	4	4	5	2	1

평가방법

○ 사업소별로 추진실적을 현장 확인

○ 각종 보고자료 적정여부 검증

- 누수탐지 및 복구, 급수공사 등의 완료보고서, 현장감리보고서 및 사진 등 확인

- 요금전산 프로그램 등을 활용하여 평가

Ⅱ	평가결과

총 평

’14년도 상반기 유수율은 96.11%로 전년도 (94.81%) 대비 1.3% 증가하였으며, 유수율 목표(95.0%)대비 1.11% 초과 달성

-  조정량은 전년대비 2,730천㎥(0.50%) 감소

-  공급량은 10,611천㎥(1.85%) 감소

▸목표 초과달성 : 8개 수도사업소

▸전년대비 증가 : 7개 수도사업소(중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남)

단위사업은 대체로 양호하게 추진되고 있으나, 사업소간 누수탐지실적의 편차가 심하여 사업소별 다점형 누수탐지의 집중적 실시가 요구되며, 유량계실 및 전송반 환경정비 미흡하여 유량계 시설주변 환경개선으로 상수도 이미지 제고 필요

유수장애시설에 대한 관리청(구청) 대장 관리가 잘되지 않아 중복 통보되는 사례가 있으며, 특히 추가 발생된 유수장애시설을 통보하지 않는 사례가 있어 체계적인 관리 필요

조례위반 처분 추징실적 사업소간 편차가 심해서 사업소별 조례위반 처분 추징 강화 필요, 가압급수 지역관리 및 중블록 유수율 목표관리는 경계지역 확정, 유량계 설치 등 지속적인 관리 필요

평가결과

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 점	94.39	96.25	93.45	94.00	95.94	94.38	94.74	94.24

※추진실적 평가표 : 붙임1

단위사업별 추진실적

○ 총 괄

구 분		’13년도 추진실적	’14년도 추진실적
			목표(년간)	실적(상반기)	%
유수율 증대실적 (%)		94.4	95.0	96.11	101.2
누수탐지(건)		1,814	2,200	1,281	58.2
기존관 철거 (㎞)		14.5	39.0	14.2	36.4
불용관정비(건)	과년도	20	6	6	100.0
	현년도	10,544	6,500	4,322	66.5
노후 인입급수관 정비(건)		-	135	116	85.9
유수장애 상수도관 이설(건)		110	103	80	77.7

1

유수율 증대(57점)

○ ’14년 6월 유수율은 96.11%로 전년도 94.81%에 비하여 1.3% 증가하였으며, 목표 95.0% 보다 1.11% 초과 달성

- 공급량 : 전년도 대비 10,611천㎥ 감소

- 조정량 : 전년도 대비 2,730㎥ 감소

○ 사업소별 유수율 현황

(단위 : %)

구 분		전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표		95.0	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
실적	’14.6월	96.11	90.86	99.32	98.65	96.69	94.52	94.62	97.88	97.28
	’13.6월	94.81	88.12	97.47	96.88	95.13	93.08	94.00	97.18	98.03
대비 증감	목표	1.11	0.86	1.92	1.85	1.69	0.72	0.22	0.89	0.68
	전년동기	1.30	2.74	1.85	1.77	1.56	1.44	0.62	0.70	-0.75
전년실적대비 가점			1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	-
평 점		-	56.79	57.80	57.65	57.00	56.29	55.88	56.34	55.74
순 위		-	4	1	2	3	6	7	5	8

※ 목표 초과 달성 : 8개 수도사업소

전년 대비 증가 : 7개 수도사업소(중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강남)

2

누수탐지(7점)

〈누수탐지 실적〉

○ 누수다발 블록 및 하수박스 등 취약지역 집중탐지로 상반기 목표 달성 – 목표대비 116.5%

○ 사업소간 탐지실적의 편차가 심함(상반기 다점형탐지 목표 미달 사업소 – 동부, 북부, 강동)

○ 80㎜ 이상 대형관 탐지실적 우대하여 점수 반영

○ 별도 계획수립 특화사업을 추진하고 있는 서부, 강서, 남부 0.3점 가점

○ 누수탐지실적 및 평가결과

- 상반기 평가에 따라 사업소별 연간 목표의 50%를 적용하여 평가

구 분	전체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
연간 목표(건수)	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
상반기 목표 (건수)	1,100	185	145	180	100	120	175	105	90
실적(건수)	1,281	250	188	168	57	139	222	172	85
달성율(%)	116.5	135.1	129.7	93.3	57.0	115.8	126.9	163.8	94.4
환산점수		5.8	5.6	4.8	4.6	5.2	5.4	6.0	5.0
가 점		-	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-
기간제 관리		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
최종 평가점수		6.8	6.9	5.8	5.6	6.5	6.7	7.0	6.0

〈기간제 근로자 관리〉

○ 전사업소에서 기간제 근로자의 출․퇴근을 지문인식기로 실시하고 있음.

○ 모든 사업소에서 근무평가 자체적으로 실시

3

기존관 철거(3점)

○ 기존관 철거율은 객관성을 기하기 위하여 연간단가에서 시행한 철거연장은 제외하고 시설관리공단에서 감독 시행한 단위사업의 철거연장 결과치를 기준으로 순위 선정

- 상반기 평가에 따라 사업소별 연간 목표의 50% 적용하여 평가

(단위 : ㎞)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’14년 목표	39.0	6.63	8.28	4.9	2.6	3.3	5.87	4.34	3.08
상반기목표	19.50	3.30	4.10	2.60	1.30	1.60	2.90	2.20	1.50
철거실적	14.20	0.90	1.80	3.80	1.00	1.90	1.10	2.00	1.70
철거율(%)	73.9	27.3	43.9	146.2	76.9	118.8	37.9	90.9	113.3
평 점	-	1.5	1.5	3.0	2.7	3.0	1.5	3.0	3.0
순 위	-	6	6	1	5	1	6	1	1

4

불용관 정비(4점)

〈과년도 불용관 정비〉

○ 과년도(’07~ ’13) 유수율향상 추진실적 점검시 적출된 미정비 불용관 총 6건 중 1건 정비 완료하고 중부수도사업소 5건은 보고서 작성하여 관리 중에 있으므로 실적 양호

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
목 표	6	6	-	-	-	-	-	-	-
실 적	6	6	-	-	-	-	-	-	-
평 점	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
순 위	-	1	1	1	1	1	1	1	1

〈불용관 정비실적〉

○ 전 수도사업소에서 상반기 사업소별 정비목표를 초과 달성

- 상반기 평가에 따라 사업소별 연간 목표의 50% 적용하여 평가

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
전체 목표	6,500	2,190	710	830	410	650	880	470	360
상반기 목표	3,250	1,095	355	415	205	325	440	235	180
실 적	4,322	1,105	687	575	275	565	487	310	318
달성도(%)	132.9	100.9	193.5	138.6	134.1	173.8	110.7	131.9	176.7
평 점	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
순 위	-	1	1	1	1	1	1	1	1

5

노후 인입급수관 정비(3점)

○ 동부수도사업소를 제외하고 상반기 사업소별 정비목표를 초과 달성하였음.

- 상반기 평가에 따라 사업소별 연간 목표의 50% 적용하여 평가함

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
전체 목표	135	27	3	23	-	4	40	5	33
상반기 목표	68	13	2	11	-	2	20	3	17
실 적	116	27	3	8	-	4	39	5	30
달성도(%)	160.3	207.7	150.0	72.7	-	200.0	195.0	166.7	176.5
평 점	-	3.0	3.0	2.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
순 위	-	1	1	8	1	1	1	1	1

6

유수장애 상수도관 이설(2점)

○ 하수도내 지장 상수도관 이설대상은 총 80건 정비완료

○ 서부 2건(0.6점), 동부 3건(0.9점), 북부 5건(1.5점), 강동 2건(0.6점)으로 미통보 대상 감점

(단위 : 건)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
목 표	103	32	24	3	5	2	18	17	2
실 적	80	20	23	3	4	2	14	12	2
달성도(%)	77.7	62.5	95.8	100.0	80.0	100.0	77.8	70.6	100.0
평 점	-	1.3	1.3	1.1	0.1	2.0	1.6	1.4	1.4
순 위	-	5	5	7	8	1	2	3	3

7

재개발, 재건축 지역관리(3점)

○ 전 사업소 사업 단계별 관리분야를 세분하여 구체적으로 관리계획 수립

○ 누수발생 가능성이 높은 재개발 ․ 재건축 지역은 지속적인 관리 감독 필요

○ 상반기 본부·사업소 합동점검시 동부 플러그 미설치 1건, 서부 보호통 종대 누수 1건, 북부 주계량기 파손 1건으로 각 0.3점 감점

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
대상(개소)	39	4	11	6	5	3	5	4	1
관리계획		우수	우수	우수	우수	우수	우수	우수	우수
관리실태		양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호
평 점		2.5	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	2.5
순 위	-	1	6	6	6	1	1	1	1

8

유량계 및 유량감시시스템 관리(5점)

○ 유량계 관리대장 이력관리가 미흡하고 사업소 자체 휴대용 유량계 활용실적 저조하여 개선 필요

○ 유량계실 환경정비(배선불량, 배수상태 등) 미흡하여 유량계 시설주변 환경개선으로 상수도 이미지 제고 필요

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
점검대상	181	43	28	34	9	15	35	13	4
점검개소	543	129	84	102	27	45	105	39	12
지적건수	17	3	1	2	0	3	4	3	1
평 점		4.90	4.95	4.90	5.00	4.65	4.80	4.60	4.60
순 위		3	2	3	1	6	5	7	7

※ 점검개소 : 점검대상(구역+중블록)×3(전송반, 유량계실, 유량시스템)

9

가압수 지역 관리(4점)

○ 가압지역 내 유수율 과대·과소 지역에 대한 가압수/자연수 지역의 경계 확정 등 지속적인 관리 필요

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
관리대상 (개소)	118	13	28	6	25	16	6	18	6
과대, 과소	55	7	9	5	10	9	-	11	4
평 점		2.4	3.0	1.5	2.8	2.3	4.0	2.2	2.0
순 위		4	2	8	3	5	1	6	7

10

조례위반 적발, 처분(4점)

○ 부정급수 등 조례위반 사항을 적출 3,715㎥을 추징하여 유수율 증대에 기여

○ 전체적으로 추징실적이 저조했으며, 사업소간 처분실적 차이가 매우 크게 나타났으며 상반기 실적이 저조한 사업소(중부, 남부, 강동)는 실적제고 노력이 필요

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
실 적 ( ㎥)	3,715	-	275	2,204	165	310	-	761	-
평 점		3.5	3.7	4.0	3.6	3.8	3.5	3.9	3.5
순 위		6	4	1	5	3	6	2	6

11

중블록 목표관리(5점)

○ 중블록별 유수율 편차 해소를 위한 지속적인 관리 필요

- 유수율 과대 중블록 : 14개소(중부 2, 동부 4, 남부 1, 강남 1, 강동 1)

- 유수율 과소 중블록 : 17개소(중부 8, 동부 4, 남부 3, 강동 1)

○ 중블록별 공급량 일일 결산제 정상 실행

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
중블록 개소	100	20	15	12	5	15	23	6	4
과대, 과소	27	11	-	7	-	2	1	3	-
평 점		3.4	5.0	3.3	5.0	4.6	4.9	3.5	5.0
순 위		7	1	8	1	5	4	6	1

12

유수율(공급량 및 조정량) 분석(2점)

○ 유량계에 의한 정확한 공급량 산출 및 증감원인 분석, 조정량 증감사항 등은 적기에 분석이 필요하며 모든 사업소 기일내 분석 양호

※ 공급량 분석 (해당월 익월 13일까지), 조정량 분석 (해당월의 20일까지)

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
배 점	2	2	2	2	2	2	2	2
감 점	-	-	-	-	-	-	-	-
평 점	2	2	2	2	2	2	2	2
순 위	1	1	1	1	1	1	1	1

13

유수율 유공실적(1점)

구 분	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
배 점	1	1	1	1	1	1	1	1
평 점	1	-	-	-	-	-	-	-
순 위	1	2	2	2	2	2	2	2

※ 중부수도사업소가 어려운 지역여건 속에서도 상반기 유수율이 전년대비 2.74% 크게 증가하여 최초 90%이상 유수율을 달성함에 따라 그 노력도 등을 고려하여 유공실적 부여

Ⅲ	우수기관 시상 및 유공 직원 시장표창 계획

사업소별 평가결과

○ 총점 (추진실적 평가표 『붙임1』)

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
총 점	94.39	96.25	93.45	94.00	95.94	94.38	94.74	94.24
순위	4	1	8	7	2	5	3	6

기관표창 및 포상금 지급

○ 훈     격 : 본부장 표창

- 최우수, 우수 사업소 표창

○ 최우수 (서부), 우수(중부, 강서, 강남), 장려(동부, 북부, 남부, 강동)

○ 포상금 지급

구 분	최우수(250)	우수(150)	장 려(100)
사 업 소	서부	중부, 강서, 강남	동부, 북부, 남부, 강동
포 상 액	250만원	150만원×3개소	100만원×4개소

○ 시상 일시 : ’14. 10월 정례사업소장 회의시

○ 소요 예산 : 1,100만원 (상수도사업비용 ․ 영업비용 ․ 일반관리비 ․ 포상금)

○ 지급 방법 : 표창 직후 해당 수도사업소 요금과장 계좌에 이체

유공 공무원 표창 상신

○ 훈    격 : 시장 표창

○ 대    상 : ’14년 상반기 유수율 향상 추진 유공 공무원

- 서부 1명, 강서 1명(’14년 상반기 유수율 우수 사업소)

붙임 : 1. ’14년도 상반기 유수율 추진실적 평가표 (붙임1)

2. 우수부서 표창장 문안 (붙임2).  끝.

(붙임 1)

(붙임 2)

우수부서 표창장 문안

━━━━━━━━━━━

제 2014- ○○호

표   창   장

○○상

○○수도사업소

위 사업소는 전 직원이 일치단결 노력하여 유수율 향상을 통한 상수도 경영합리화에 기여하여 왔으며, 특히 2014년도 상반기 유수율 향상 추진실적 평가결과 우수 부서로 선정되었기에 이를 표창합니다.

2014년 10월  일

서울특별시상수도사업본부장  남 원 준