역류방지밸브 설치 관련 대책회의 자료

수도법 시행령 제53조 및 수도조례 제 17조 규정에 의거 설치하고 있는 역류방지밸브와 관련하여 ‘14년 설치 및 집행실적 부진에 따른 대책마련을 위해 회의

Ⅰ		2014년 사 업 계 획

사업개요

❍ 추진기간 : 2014. 1 ～ 12

❍ 목표량 : 130,000개

❍ 사업비 : 25억원

세부 추진계획

❍ 2014년 구경별 역류방지밸브 설치목표

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
구경	130,000	13,700	14,000	18,000	21,000	19,000	17,300	6,000	21,000
13㎜	100,941	9,164	11,310	13,186	18,368	15,610	13,890	4,327	15,086
20㎜	15,578	2,427	1,129	2,825	1,418	1,766	1,850	413	3,750
25㎜	7,998	1,043	861	1,325	800	1,047	978	663	1,281
30㎜	2,891	373	400	418	200	299	370	306	525
40㎜	1,779	326	218	170	174	209	151	271	260
50㎜	813	367	82	76	40	69	61	20	98

Ⅱ		2014년 설치실적

‘14년 만기계량기 교체 실적(10월말)

(단위 : 천원)

	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
만기목표	146,269	14,610	15,750	20,071	28,661	19,519	18,228	4,596	24,834
집행액	133,272	13,208	14,911	17,396	22,196	17,089	20,473	7,911	20,088
집행률	91.1%	90.4%	94.7%	86.7%	77.4%	87.6%	112.3%	172.1%	80.9%

‘14년 역류방지밸브 설치 실적

(단위 : 천원)

	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
설치목표	130,000	13,700	14,000	18,000	21,000	19,000	17,300	6,000	21,000
설치실적 (10월말)	47,322	10,220	1,249	6,024	6,409	9,910	5,184	4,107	4,219
	36.4%	74.6%	8.9%	33.5%	30.5%	52.2%	30.0%	68.5%	20.1%
연말예상실적	56,495	11,622	3,000	6,474	9,909	11,210	5,414	4,147	4,719
	43.5%	84.8%	21.4%	36.0%	47.2%	59.0%	31.3%	69.1%	22.5%

‘14년 역류방지밸브 설치 집행실적(11/20 기준)

(단위 : 천원)

	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재
예산	2,500,000	90,876	92,556	64,956	137,356	120,556	111,036	47,756	126,156	1,708,752
집행 실적	1,791,733	41,804	5,648	27,517	31,154	44,582	32,241	18,667	18,942	1,571,178
	71.7%	46.0%	6.1%	42.4%	22.7%	37.0%	29.0%	39.1%	15.0%	91.9%
연말집행예 상	1,842,233	47,903	15,648	31,517	46,379	54,582	33,242	20,667	21,117	1,571,178
	73.7%	52.7%	16.9%	48.5%	33.8%	45.3%	29.9%	43.3%	16.7%	91.9%

역류방지밸브 미설치 사유(사업소 제출자료)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
	85,950	2,988	13,662	11,372	15,787	7,179	15,289	3,804	15,869
수압부족	20,610	-	3,727	68	7,291	5,554	887	1,708	1,375
관노후	34,771	1,607	4,474	6,793	5,703	336	7,333	1,084	7,441
기설치	11,964	378	1,640	1,481	855	561	692	-	6,357
주계량기	6,113	360	1,543	1,271	417	728	771	547	476
심도	5,058	269		1,692			2,877		220
기타	7,434	374	2,278	67	1,521		2,729	465

역류방지밸브 설치 부진 사유

❍ 추진10월말 현재 만기계량기 교체실적(91%)은 양호하나, 역류방지밸브는 계량기교체 단가에 비해 상대적으로 매우 낮고 설치시 누수 우려로 작업자의 작업기피로 실적부진(43.5%)

[ 만기계량기 교체시 용역단가 ]
2014년 단가 (15,20 ㎜)	설치 단가	비 고
만기교체(역류방지밸브 포함)	7,447 원	- 만기 교체시 역류방지밸브 추가 설치비용 : 967 원
만기교체(역류방지밸브 제외)	6,480 원

[ 급수공사 시 계약단가 ]
2014년 단가 (15,20 ㎜)	설치 단가	비 고
계량기교체 (역류방지밸브 포함)	34,737 원	나사철거 3개소(3,855원×3) + 나사이음 3개소(7,724원×3)
계량기교체 (역류방지밸브 제외)	23,158 원	나사철거 2개소(3,855원×2) + 나사이음 2개소(7,724원×2)
- 급수공사시 역류방지밸브 추가 설치비용 : 11,579 원

❍ 내부배관 노후, 수압부족, 계량기함 공간 협소 등

❍ 2006년 역류방지밸브 시범 설치 대상의 만기도래 (1만 여건)

Ⅲ		회 의 내 용

❍ 사업소별 역류방지밸브 설치실적 저조의 실질적인 사유 파악

❍ 연말까지 역류방지밸브를 최대한 설치할 수 있도록 업체 독려

❍ 향후 역류방지밸브 설치 실적 개선을 위한 대책 마련 등. 끝.