설계변경 자문회의 지적사항 조치결과(제14차)

□ 공사명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사              부서: 토목부

연번	자문안건	설계변경유형	자문요청금액 (A)	절감액 (B)	최종반영금액 (C=A-B)
1	동상방지층 수량변경	⑧	감 425백만원	감 147백만원	감 572백만원
2	배수구조물 시공방법 변경	①	감 106백만원	감 5백만원	감 111백만원
3	자전거도로 포장규격 변경	⑧	감 68백만원	-	감 68백만원
4	가드레일 규격변경	①,⑥	증 104백만원	-	증 104백만원
5	보차도경계석 규격 변경	⑧	증 105백만원	-	증 105백만원
6	군 작전연결통로 설치	①	증 232백만원	감 1백만원	증 231백만원
7	발파암 판정(2차) 결과 반영	④	증 355백만원	감 91백만원	증 264백만원
8	선사로 종단계획고 조정에 따른 변경	①	감 356백만원	감 17백만원	감 373백만원
9	발파암 판정(3차) 결과 반영	④	증 195백만원	감 12백만원	증 183백만원
10	도로 노면표시 원인자부담공사 반영	⑧	증 52백만원	-	증 52백만원
	계		증 88백만원	감 273백만원	감 185백만원

※ 자문요청금액은 자문회의 요청서의 안건별 증․감액임

※ 설계변경 유형

① 정책, 계획 등 사업계획 변경  ② 민원해결, 보수,보강 ③ 문화재 및 지장물 이설

④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등

⑦ 공법변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 유관기관 사전협의 미흡

□ 자문결과 안건별 지적사항 조치결과                        (단위:백만원)

자문건명	지적사항	조치결과	요구액	절감액	증감사유
					주요공종	사 유
동상방지층 수량변경	-동상방지층 삭제에 따른 토공 물량변동 비교검토	-절토 및 사토량 감소금액 반영	감425	감147	포장공	절토,사토 금액 반영
배수구조물 시공방법 변경	-실적공사비 반영여부 검토	-실적공사비 협의율 반영	감106	감5	배수공	실적공사비 협의율 적용
	-단가산출 적정성 여부 검토	-실적공사비(협의율)+ 표준품셈(낙찰율) 적용
자전거도로 포장규격 변경	-박층포장 타공법 비교검토	-비교검토표 첨부	감 68	-	포장공
가드레일 규격변경	-원설계자 검토의견서 누락	-첨부	증104	-	부대공
	-충돌시험성적서 누락	-첨부
	-자재단가 재검토(조달단가)	-조달단가 없음
보차도경계석 규격 변경	-신규단가 재검토	-재료비(협의율)+시공비 (기계약단가) 적용	증105	-	포장공
군 작전연결통로 설치	-PC암거설치 비교견적실시	-비교견적서	증232	감1	부대공	실적공사비 협의율 적용
	-견적서 수취인 변경	-수취인 변경
	-실적공사비 반영여부 검토	-실적공사비 협의율 반영
발파암 판정(2차) 결과 반영	-암판정위원 서명 누락	-서명 첨부	증355	감91	토공	실적공사비 협의율 적용
	-발파암 매각절차 서류누락	-매각관련 서류 첨부
선사로 종단계획고 조정에 따른 변경	-단가산출, 일위대가표상 단가적용 상이	-오류부분 수정	감356	감17	토공	가드레일 단가수정
	-자재가격, 노임단가 적용시기 통일	-14년 전반기단가 동일 적용
발파암 판정(3차) 결과 반영	-암판정위원 서명 누락	-서명 첨부	증195	감12	토공	실적공사비 협의율 적용
	-발파암 매각절차 서류누락	-매각관련 서류 첨부
도로 노면표시 원인자부담공사 반영	-수량증가분 계약단가와 산출단가 비교검토	-비교표 첨부	증 52	-	차선 도색

※ 주요공종

- 토공, 가시설공, 구조물공, 포장공, 교량공, 터널공, 차선도색, 부대공 등