	주식회사	동일기술공사

우135-830 서울시 강남구 논현동 231-5(3층)/전화:(02)3446-6047~8/팩스:(02)3446-6049 / 담당 : 김명동

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

문서번호 : 동일(현) 제14 - 785호 시행일자 : 2014. 10. 23. 수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장 참 조 : 도시철도설비부장	선결			지시
	접수	일자 시간		결 재 ‧ 공 람
		번호
	처리과
	담당자
	심사자

제    목 : 915공구 정거장 수익시설 확충에 따른 실정보고

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 도시철도설비부-2860호(2013.03.28.) 관련입니다.

2. 서울 지하철 9호선 2단계 915공구 정거장 전기설비 공사중 정거장내 수익상가시설 추가관련 실정보고내용을 검토하고 검토의견 및 관련자료를 붙임하여 보고합니다.

붙    임 : 1. 검토의견서                       1부

2. 전기공사 내역서 및 산출자료        1부     끝.

지하철 9호선 915 공구 책임감리단
책임감리원	장 해 천

【별첨2】대외용 성안지

【별첨2】대외용 성안지

【별첨2】대외용 성안지

【별첨2】대외용 성안지

검 토 의 견 서

문서번호

검토기간

2014. 10. 13 ~ 10. 22

공 사 명

서울지하철 9호선 2단계 915공구

926, 927정거장 전기공사

작 성 자

김  명  동 (인)

제    목

915공구 정거장 수익시설 확충에 따른 실정보고

□ 검토목적 :

서울 지하철 9호선 2단계 915공구 926정거장의 수익시설 확충을 위한 임대상가 시설관련 공사내역, 산출수량 및 도면의 적정성 여부 검토.

□ 검토내용:

가. 관련근거: 도시철도설비부-2860(2014.03.26.) 지하철 정거장 수익시설 확충에 따른 업무지시

나. 설계변경현황

구 분		수익상가 개소 및 면적	전기용량	비고
926정거장	지하1층 대합실	수익상가 1개소*20mm2	㎡당 0.5KVA=10KVA

다. 공사비 증감현황

구 분	공사금액(원)			비고
	변경전	변경후	증 감
926정거장	0	8,129,000	(증)8,129,000

□ 검토의견

- 9호선 2단계 정거장내 수익시설 관련하여 내역서 및 수량산출서, 도면을 검토한 결과 타당하다고 사료되며, 물량 증감에 따른 공사비 증,감에 대해서는 추후 설계 변경시 면밀히 검토하여 정산하고자 합니다