'14년 도시활력증진사업 계획서 검토 결과

구분		사 업 명	검토의견	비고
광역	기초
서울	구로구	구로디저털단지도심활성화를위한가로경관개선사업	ㅇ 광역지자체 검토의견 미제출 ㅇ ‘13년 집행실적 및 '14년 집행계획 보완 - ‘13년 집행실적은 0%이나, 사업계획서에 100%로 되어 있어 보완이 필요하며, '13년 이월예산을 감안하여 ’14년 집행계획 작성 필요
	용산구	길.남산으로흐르다	ㅇ 광역지자체 검토의견 미제출
경기	남양주시	농촌생활환경정비사업	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재확인 필요 - ‘14년 단년도 사업으로 제출하였으나, ’15년 사업계획이 포함되어 있는 등 불일치하므로 계획서 재확인 필요
		마을활력발전소'학습등대'	ㅇ 총사업비 및 사업기간 부적정 - 당초 승인된 총사업비(3,000백만원, 국비1,500백만원) 및 사업기간(14～16)으로 계획서 작성 필요
	부천시	부천시원도심문화복합시설 “FANTABOX"조성사업	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(7,720백만원, 국비3,860백만원)로 계획서 작성 필요
		원도심문화복합기초시설“판타박스” 조성사업	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(10,000백만원, 국비5,000백만원)로 계획서 작성 필요
	시흥시	재생,도시에활력을불어넣다	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(4,900백만원, 국비2,450백만원)로 계획서 작성 필요
		오이도오션프런트	ㅇ 매칭내역 증빙서류 미제출
		ART&ECOCUBE프로젝트	ㅇ 매칭내역 증빙서류 미제출
		에너지절약시범마을조성	ㅇ 주민협의체 관련 서류 추가제출 필요 - 에너지절약시범마을조성을 위한 주민 협의 진행상황, 민원발생 시 조치계획 등 추가서류 제출 필요
	안산시	대부도해양생태관광마을육성	ㅇ 각 사업별 세부사업계획서 제출 요구
		해양생태관광시범마을조성	ㅇ 각 사업별 세부사업계획서 제출 요구
	오산시	배우면서가르치는숨쉬는교육도시조성	ㅇ 매칭내역 증빙서류 미제출
	용인시	낙후된농촌지역생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 부적정 - 당초 승인된 총사업비(10,932백만원, 국비5,466백만원) 및 사업기간(‘16)으로 계획서 작성 필요 * 사업기간 연장 필요시 변경사유서 제출 필요
	의왕시	살기좋은금천만들기	ㅇ 광역지자체 검토의견 미제출 ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(5,000백만원, 국비2,500백만원)로 계획서 작성 필요 * 지방비 추가 투입 필요시 변경사유서 제출 필요
	화성시	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 요구 - 도활사업으로 편성(‘13)된 이후의 총사업비 및 사업기간(’13～‘17)으로 제출 필요
		기계화경작로확포장	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 요구 - 도활사업으로 편성(‘13)된 이후의 총사업비 및 사업기간(’13～‘17)으로 제출 필요
		소규모용수개발	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 요구 - 도활사업으로 편성(‘13)된 이후의 총사업비 및 사업기간(’13～‘17)으로 제출 필요
대전	동구	주거환경개선사업(구성2구역등)	ㅇ 각 사업별 세부사업계획서 제출 요구 ㅇ LH 실집행현황 제출 요구(구성2,대동2,대신2,소제) - 2단계 주거환경개선사업으로 LH에 지급된 예산의 집행현황, 잔여예산 집행계획 제출 필요
		주거환경개선사업(홍도구역)	ㅇ 각 사업별 세부사업계획서 제출 요구
		주거환경개선사업(대동3구역)	ㅇ 각 사업별 세부사업계획서 제출 요구
충남	천안시	농촌생활환경정비사업	ㅇ 사업기간 재확인 필요 - 사업기간과 연차별 사업계획 불일치
광주	광산구	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		지표수보강개발	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		기계화경작로확포장	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		농촌농업생활용수개발	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
	남구	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
	동구	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		지표수보강개발	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
전남	목포	도심수변재생및타소제로라인구축	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(1,000백만원, 국비500백만원)로 계획서 작성 필요
대구	달성군	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		기계화경작로확포장	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
	북구	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
	수성구	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
경북	포항시	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		기계화경작로확포장	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
		농촌마을종합개발	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(10,680백만원, 국비6,480백만원)로 계획서 작성 필요
		포항원도심재생사업	ㅇ 매칭내역 증빙서류 확인 불가
부산	금정구	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
	기장군	농촌생활환경정비	ㅇ 총사업비 및 사업기간 재산정 필요 - 사업기간의 무기한 산정은 불가한 바, 구체적인 총사업비 및 사업기간 산정 필요 * 총사업량 산출근거 제출 필요
	남구	문현동생태숲조성사업	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(160백만원, 국비80백만원)로 계획서 작성 필요
	사하구	지성이면감천문화마을조성사업	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(17,000백만원, 국비4,800백만원)로 계획서 작성 필요
	중구	오름길문화만들기	ㅇ 연차별 사업계획 조정 필요 - '13년도 국고세수부족으로 불용된 예산은 '15년도에 재교부할 계획이므로, 변경된 교부계획에 맞춰 사업계획 조정 필요
울산	남구	예술이숨쉬는길조성사업	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(3,200백만원, 국비1,200백만원)로 계획서 작성 필요 * 지방비 추가투입 필요시 변경사유서 제출 필요
	동구	일산진지구주거환경개선사업	ㅇ 사업기간 조정 필요 - ‘15년 잔여국비(714백만원)가 있는 바 사업기간을 ’14년에서 ‘15년으로 조정 필요
	울주군	언양중심시가지거리조성사업	ㅇ 총사업비 부적정 - 당초 승인된 총사업비(7,500백만원, 국비2,000백만원)로 계획서 작성 필요 * 지방비 변경시 변경사유서 제출 필요