문서번호	토목부-2868
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

개봉 두산아파트 민원처리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

-남부순환로(개봉역앞)구조개선공사-

개봉 두산아파트 민원처리 계획

남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 구간내 개봉 두산아파트 민원(차량 역방향 차로, 방음벽 연장, 한전지중화 등)에 대한 처리계획 보고

□ 현 황

❍ 개봉 두산아파트에서는 민원(차량 역방향 등 8건)을 지속적으로 제기

※ 남부순환로 공사관련 민원서류 접수(2014. 1.22.)

❍ 민원해결이 되지 않아 아파트 담장 철거 후 방음벽 설치 등 후속 공사를 추진하지 못하고 있음.

□ 추진경위

❍ '09.11. : 민원설명회 개최(도로계획과 설명)

❍ '10.12. : 공사시점까지 방음터널 설치요구(L=319m)

❍ '13. 1. : 방음터널 설치 불가 사유 및 방음벽 개선 설치안 설명

(구로구청장 개봉2동 신년인사회시)

❍ '13. 3. : 두산아파트 주민 구로구청 방문 민원

❍ '13.10. : 민원회신(토목부-19005호)

❍ '13.12. : 디자인 심의(서울시, H=6m직립형 방음벽 설치 권장 )

❍ '14. 1. : 두산아파트 주민설명회 2차 개최(두산아파트)

- 개최결과 : 차량역방향, 삼환 아파트 주변 빗물받이를 지하차도측으로 설치,  꺽기형(7m+2m) 방음벽을 공사시점까지 연장 등

□ 추진방향

❍ 처리 가능한 민원과 경찰청 규제심의 등 민원을 구분하여 단계별 조치

❍ 유관기관 협의(경찰청, 한전 등) 결과 처리기간 지연시 주민설명회 개최하여 충분한 이해 설득

❍ 서울시 관련부서 협조가 필요한 민원에 대하여는 적극 반영 요청

□ 민원처리 계획

번호	민원내용	조치계획
1	꺽기형 방음벽(H=7m+2m)을 공사 시점까지 연장 설치 요청	○ 꺽기형 방음벽 설치 - U-Type구간 ~ 두산아파트 후문 : 꺽기형(7m+2m) 설치(L=170m) - 두산아파트 후문 ~ 공사시점 : 직립형(5m) 설치(L=149m)
2	삼환아파트 주변 빗물받이를 지하차도쪽으로 설치 요청	지하차도측 차도는 중층까지 포장이 완료되어 있으므로 중앙 안전지대 (폭2m)에 빗물받이 설치
3	연결로 종단구배 조정 요구	현재 설치된 옹벽 기초가 노출되지 않는 범위 내에서 종단을 일부 조정
4	차도와 인도사이 난간설치 요구	예산 범위 내에서 유지관리 기관과 협의 후 반영
5	한전주 지중화 요구	한전에서 지중화 시설을 위한 설계 중으로 10월말까지 완료(예산확보필요)
6	두산APT후문~개봉고가 하부까지 역방향 차로 통행	서울지방경찰청과 협의 후 반영
7	두산APT정문에서 남부순환로 (김포공항방향) 진입	가능
8	저소음 배수성 포장 요청	저소음 포장(개질 아스팔트) 시행

□ 향후계획

❍ 2014. 2. : 디자인심의 재상정

: 서울지방경찰청 교통규제 심의 의뢰

❍ 2014. 3. : 지중화사업 협약서 체결(서울시 ↔ 한전)

❍ 2014.10. : 지중화 관로공사 완료

□ 행정사항

❍ 민원처리 계획(안)으로 민원회신(개봉두산아파트입주자대표회의)

붙 임 : 개봉 두산아파트 민원 현황 및 조치계획.  끝.