KCI	(주)한국해외기술공사 bk-620@hanmai.net

우)110-450 / 서울시 종로구 원남동 194-창곡빌딩 5층 / 전화: 02) 734-0597 / FAX: 02) 734-0587 / 담당 : 최벙기

문서번호 : 율곡감 제2014 - 88호	선결			지시
시행일자 : 2014. 03. 14.
	접수	일자 시간		결 재 ․ 공 람
수 신 : 도시기반시설본부장		번호
	처리과
경 유 :
	담당자
참 조 : 토목부장

제   목 : 전력구 이설시기 검토 보고

1. 업무연락전-SMIH-14-18931호(2014. 03. 03) 및 시공사 공문 율곡로2014-657호(20014. 03. 11)와 관련입니다.

2. “율곡로 창경궁 앞 도로구조개선공사”의 전력구 이설시기에 대하여  붙임과 같이 검토·보고 합니다.

붙    임 : 1) 감리 검토의견서 1부.

2) 도로점용 허가 신청서 1부.  끝.

율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사외 1개소

책 임 감 리 원    손   기   수

검  토  의  견  서

기술검토건명	전력구 이설시기 검토 보고
공 사 명	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	검 토 구 분	전력구
검 토 의 견	2014. 03. 11∼2014. 03. 13	검 토 자	책임감리원: 손기수
근 거 공 문	SMH-14-18931(2014. 03. 03) 율곡로2014-657호(2014. 03. 11)	회 신 공 문

1. 검토목적

율곡로 전력구 이설공사와 관련하여 유관기관(한국전력공사 경인건(환) 62101 -238 (2014. 02. 26)으로부터 시공가능 일정에 대하여 문의되어 본 공사 일정을 고려 가능 예정일을 검토하고저 함.

2. 검토내용

1) 현 황

□ 평면도

□ 단면도

구 분	규 격	연 장	일 정	비 고
1구간	Ø 2,100mm	185.5m	2015. 04 ∼ 2015. 05
2구간	〃	324.5m	2015. 03 ∼ 2015. 04
3구간	〃	336.4m	2015. 05 ∼ 2015. 06

2) 철거 가능 시기

3. 검토의견

- 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 구간내 기존송전선로 철거 순서는 지하      차도구간(2구간: L=324.5m), 공사시점부구간(1구간: L=185.5m), 공사종점부      구간(3구간: L=336.4m) 순서로 시행 예정이며,

- 철거 예정시기는 2015년 3월경 이후에 철거가 가능하나 부득이 토목공정 지      연될시 철거 예정시기도 지연 될 수 있을것으로 사료됩니다.  끝.

율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사외 1개소

책 임 감 리 원     손   기   수

■ 도로법 시행규칙[별지 제21호서식] <개정 2012.11.30>
도로점용 허가신청서
※ 뒤쪽의 유의사항 및 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일			처리기간	뒤쪽 참조
신청인	① 성 명 서울특별시도시기반시설본부 (법인명)	② 주민등록번호ㆍ외국인등록번호 (법인등록번호) 203-83-00918
③ 주 소 서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서소문청사2동2-3층)	전 자 우 편 park8370@seoul.go.kr
④ 전화번호 02-3708-2558	휴대전화번호 #############
신청내용	⑤점 용 목 적 송전지중전력구 기존강관Ø2.100 철거
⑥ 점용장소ㆍ면적 종로구 돈화문(권농동5번지) ~ 원남동사거리(원남동166번지) 2,454㎡
⑦점 용 기 간 2010.10.11~2015.06.30	⑧굴착기간 2010.10.11~2015.06.30
⑨ 공작물(시설)구조 강관Ø2.100m
⑩ 공사시설방법 흙막이 가시설 설치
⑪공 사 시 기 2010.10.11~2015.06.30
⑫ 도로복구방법 굴착후 재포장
⑬ 도로의 종류 및 노선명 율곡로
「도로법」 제38조 및 같은 법 시행령 제28조제1항에 따라 위와 같이 도로점용허가를 신청합니다.
2014년 03월 일
신청인	서울특별시도시기반시설본부장 (서명 또는 인)
도로 관리청	귀하
첨부서류	1. 설계도면(전자도면에 한정합니다) 1부 2. 주요지하매설물 관리자의 의견서(도로의 굴착을 수반하는 경우에만 해당합니다) 1부 3. 주요지하매설물의 사후관리계획(신청인이 주요지하매설물의 관리자인 경우에만 해당합니다) 1부 4. 「도로법 시행령」 제34조에 따른 도로관리심의회의 심의ㆍ조정 결과를 반영한 안전대책 등에 관한 서류	⑭수수료 1,000원
	210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]