	주간 업무 현황 보고서(14.06.27)
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업	작성부서	정보공개정책과

▪ 사 업 명	: 서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업
▪ 사 업 부 서	: 정보공개정책과
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.31 ~ 2014.07.28

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척률		비고
				계획	실적
1	사업관리	2013.12.31~2014.07.28		82.8%	82.8%
2	기록 수집	2013.12.31~2014.05.31		86.6%	86.6%
3	콘텐츠 개발	2013.12.31~2014.07.28		48.0%	48.0%
	계			68.7%	68.7%

주간 업무 현황 보고서

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                       /2

진행단계	실행 및 통제						전체 진척률	68.7%
단위과제	전주실적(2014.06.16 ~ 2014.06.20)			금주실적(2014.06.23 ~ 2014.06.27)			차주계획(2014.06.30 ~ 2014.07.04)
	내 용		진척률	내 용		진척률	내 용		진척률
	<사업관리> 20차 주간회의 일시: 2014.06.19(목) 14시 30분		80.4%	<사업관리> 21차 주간회의 일시: 2014.06.27(금) 14시 30분		82.8%	<사업관리> 22차 주간회의 일시: 2014.07.03(목) 14시 30분		85.0%
	<기록수집> 단체 접촉 및 기록수집 국가기록원 : 기록수집 현황 확인 한국정책방송원 : 대한뉴스 자료 수집 현황 확인 TBS : 서울광장 관련 목록 확인 수집 후속작업 진행 감사패 제작 준비 서울광장 분류체계 보완 주제분류 검수 및 보완 진행 중 서울광장 수집기록 목록 정리 수집기록 목록 검수 및 수정 시민인터뷰 준비 시민인터뷰 준비 : 대상 선정, 일정 확인, 장비 확인 비전자기록 디지털화 박물류, 도서류 촬영		84.0%	<기록수집> 단체 접촉 및 기록수집 국가기록원 : 기록수집 현황 확인 한국정책방송원 : 대한뉴스 자료 수집 현황 확인 전쟁기념관, KBS미디어 : 한국전쟁 관련 기록물 수집하려했으나 저작권 문제로 미수집 시정기록 수집 본청 문서고 : 서울광장 관련 기록물 목록 점검 및 선별 중 TBS : 서울광장 관련 기록 요청, 내부에서 영상 디지털화 진행 중 수집 후속작업 진행 감사패 제작 준비, 기증/위탁확인서 준비 서울광장 수집기록 목록 정리 수집기록 목록 검수 및 수정 전자기록 파일명 일괄변환 중 시스템 설치 데이터 마이그레이션 준비 서울시 설치 미팅(06.27)		86.6%	<기록수집> 단체 접촉 및 기록수집 국가기록원 : 기록수집 현황 확인 한국정책방송원 : 대한뉴스 자료 수집 현황 확인 시정기록 수집 본청 문서고 : 서울광장 관련 기록물 목록 점검 및 선별. 비전자기록 디지털화 TBS : 서울광장 관련 기록 요청, 내부에서 영상 디지털화 진행 중 시민인터뷰 준비 시민 인터뷰 진행 서울광장 수집기록 목록 정리 수집기록 목록 검수 및 수정 전자기록 파일명 일괄변환 시스템 설치 데이터 마이그레이션 준비 시스템 설치(07.03) 예정		90.0%
	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 1차 디자인 완료 웹 콘텐츠 테스트용 업로드 각 매체별 작가 작업 진행(영상 감독, 일러스트 작가, 텍스트)		45.0%	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 2차 디자인 각 매체별 작가 작업 진행(영상 감독, 일러스트 작가, 텍스트)		48.0%	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 2차 디자인 완료 웹 콘텐츠 캡션작업 웹 콘텐츠 일부 업로드 구술 인터뷰 영상촬영 진행 각 매체별 작가 작업 진행(영상 감독, 일러스트 작가, 텍스트)		60.0%
미결업무 및 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물/ 별첨사항	일련번호	내 용
	1	수집기록관리시스템 설치 관련 회의록